연번	공사명(공구명)	공사개요	도급비 (억원)	착공일	준공 예정일	공사추진사항	공정(%)
계	도시기반 시설본부	54개 공사장				토목부26, 건축부6,설비부1,방재시설부7,도시철도토목부10,도시철도사업부4
소계	시 설 국	40개 공사장
	토 목 부	26개 공사장
1	강남순환도시고속도로(4공구)	L=2.48km, B=4~6차로	1,673	2001-12-29	2016-05-19	* 구조물 1. 본선 시점부 STA.1+320~400 방음벽 벽체 Con&#039;c 타설 2. 본선교 MBR1~3, DRA BR2~3 교량배수시설 설치 3. 본선교 MBR3 상부 슬래브 철근 조립(수서) 및 청소 4. 본선교 P11 코핑 거푸집 조립(검측:16시) 5. DRA BR1 상부 슬래브 철근 조립 6. DRB BR1 낙하물방지공 설치 7. DRB BR2 상부 슬래브 거푸집 조립 8. 남북간연결도로 상부 슬래브 자재 정리	57
2	강남순환도시고속도로(5공구)	L=5.1km, B=6~8차로	4,029	2007-11-20	2016-05-19	토목공사 - 환기덕트 방수 작업 - L형측구 기초 거푸집 설치 및 타설 작업 - 배수공동구 디치 그레이팅설치 건축공사 - 영업소 2층 발코니 바닥 타일시공 - 시점부 지하1층 벽체 및 천정 도장 - 영업소 1~2층 천정 시공 기계공사 - 크레인 주행집진장치 설치 작업 - 성산 A-RAMP 구간 물분무 입상 및 횡배관 제작 - 영업소 배수펌프 및 배관 설치 전기공사 - 시점부 공동구 및 수서4차선 상부트레이 설치 - 톨부스 박스설치 및 배관 소방공사 - 소화전 및 물분무함 결선, 입선 및 정리	65
3	강남순환도시고속도로(6-1공구)	L=1.13km, B=3~4차로	1,442	2009-05-20	2016-05-19	◆ 토공 ◎ 시점부 - 본선 토사 반출 ◎ 시점부 - Ramp-B 우수관로 터파기 ◆ 터널공 ◎ 시점부 - 성산 갱문 라이닝 외벽 거푸집 제작 및 설치 ◎ 종점부 - 수서 맹암거 관부설 및 되메우기 ◆ 구조물공 ◎ 시점부 - Ramp-D 3block 슬래브 및 벽체 콘크리트 타설 - 통합집수정 수서 공동구 철근 가공 및 조립 - 통합집수정 성산 공동구 거푸집 설치 ◎ 종점부 - 성산 1span 상부 슬래브 철근 조립 - 성산 7span 버림 거푸집 설치 및 타설 - 수서 7span 2단 벽체 콘크리트 타설 ◆ 전기공 - 신림1터널 상부 트레이 설치 - RAMP-D터널 트레이 설치 ◆ 기계,건축공 - 통합집수정내 소화배관 제작 - 통합집수정 덕트 설치 작업 - 신림1터널 물분무배관 용접 및 설치	76
4	강남순환도시고속도로(6-2공구)	L=2.4km, B=8차로	1,151	2009-04-01	2016-05-19	시점부 (지하차도공) - 성산 개착박스 BL2 벽체1단 소화전 철근조립, BL3 기초철근 조립 개착아치 토공정리 및 유공관 부설 - 수서 개착박스 BL1 벽체1단 비계설치,BL3 기초 콘크리트 타설 개착아치 면청소 및 프라이머 도포 (부대공) - 지하차도 구간 전기배선 점검, 시험실 철거 및 현장정리 - 우수관로 터파기, 지장물 철거, 제2변전소 시험발파 준비, 현장정리	87
5	강남순환도시고속도로(7-1공구)	L=1.04km, B=6차로	685	2010-06-01	2016-05-19	터널공 1. 서초터널(성산) 공동구 5차 거푸집 해체 2. 서초터널 집진기실 라이닝 Con&#039;c타설(11㎥) 3. 서초터널 집진기실 라이닝 철근조립 4. 서초터널 (수서) 타일시공 5. 서초터널 Sta.1+010 대인용 횡갱 라이닝 Con&#039;c타설(14㎥) 구조물공 1. 사당IC교 P1 강교 반입장 부지정리 배수공 1. 사당IC교 A2 보강토옹벽 시공 부대공 1. Ramp-C L형옹벽 기초 터파기	86
6	강남순환도시고속도로(7-2공구)	L=2.7km, B=6차로	1,861	2008-04-01	2016-05-19	1. 서초터널 - 수서방향 종배수관 설치 - 수서방향 공동구 뚜껑 설치 2. 선암교 - 성산 T-1 슬래브 동바리 및 거푸집해체 - 성산 T-2 슬래브 CON`C 양생 - 성산 T-3 슬래브 CON`C 양생 - 성산 T-4 상부 슬래브 거푸집 및 철근 조립 - 수서 T-7 방호벽 스트럽 철근 조립 - 수서 T-8,9 방호벽 앵커 설치 전기공사 : 서초터널 케이블 트레이 앵커 및 전선 설치 건축공사 : 영업소 옥상층 비계설치 및 콘크리트양생 제2변전소 기초 철근 가공	86
7	강남순환도시고속도로(8공구)	L=7.96km, B=4~10차로 (교량 2개소, 지하차도 3개소)	2,215	2002-07-03	2018-07-30	- 주암교 수서방향 2경간 슬래브 거푸집 설치[목공:7,보통:2,카고:1] - 주암교 수서방향 면정리작업[보통:2] - 본선고가교 P3 코핑폼 제작 조립[기능공:3,,보통:2] - 민자접속부 교통처리 안전시설물 SF-2 난간대 도색[반장:1,보통:3] - STA.1+180 중앙파일천공/항타 작업 [천공기:1,천공공:1,신호수:2,B/H0.6W:1] - 화물터미널 앞 지하차도 작업구 가복공 제작[가시설공:1,반장:1] - 화물터미널 앞 지하차도 신호등 이설[기능공:2,B/H0.3w:1,카고:1] - 구룡지하차도 기존도로부 아스콘 깨기 작업[B/H 0.6w:1] - 구룡지하차도 기계실 외부 타일마감공사[기능공(타일공):2]	31
8	겸재교 건설 및 연결도로 확장공사	교량 : L=395m, 15~20m, 도로 : L=750m, 20→30m,	294	2008-10-23	2015-12-31	■ 본선구간 - 현장정리 ■ 램프구간 - 램프B구간 보도부 도로경계석 설치 - 램프A,B옹벽구간 연석 기초 거푸집설치	84
9	남부순환로-오정대로간 도로개설공사	강서구 발산동~부천시계 (남부순환로~부천시 오정대로 삼거리) - 도로개설 : B=40m L=1.23㎞ (폭 40m, 교량1개소)	98	2010-09-29	2015-12-30	1.토공 ○부천시구간 토사성토,다짐(STA.NO 1+100~1+200) 2.구조물공 ○가족길교 벽체 거푸집설치(STA.NO 0+940~0+960) ○가족길교 P/F빔 가로보 철근가공(STA.NO 0+940~0+960) 3.부대공 ○부천구간 기존구조물철거	76
10	동부간선도로 확장공사(2공구)	도로확포장 : L=3.2km (지하차도 2개소, 옹벽)	1,705	2008-12-30	2015-12-31	◎ 도봉5단계 육상구간(STA.3+289.5~3+400) - STA.3+350~3+420 복공판 철거 - STA.3+099 수로암거 구조물 터파기 - STA.3+099 수로암거 토류판 설치 및 띠장 설치 - 야적장 정리 - 현장정리 ◎ 건축관리동 - 1층 바닥 SLAB, 보 거푸집 설치 작업 - 1층 바닥 보 철근 가공 및 테두리보 배근 작업 - 외부 쌍줄 비계 설치 작업 - 제진필터실 집수정 양수기 호수 이설	59
11	동부간선도로 확장공사(3공구)	도로확포장 : L=2,2km (지하차도 2개소, 고가차도, 보도육교)	558	2008-02-15	2015-12-31	- 장암지하차도 하부기초 철근절단 및 가공, 조립 / 거푸집설치 - 기초철근용접 및 그레이팅 앵글설치 - 장암지하차도 띠장설치 / 계측기설치 - 수락고가차도 방음벽철거	56
12	방화대교 남단 접속도로 건설공사	L=1.046km, B=40m	660	2005-10-05	2015-10-31	Ramp-A/C 종방향 신축이음 설치 Ramp-C 종방향 신축이음 설치(블럭아웃) Ramp-A1/C 교량배수시설 설치 측구 보수 및 면벽 설치	93
13	서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사	- 고가철거 및 신설 L=753m (고가설치, 옹벽설치, 기존고가 보수보강)	171	2011-01-06	2015-12-31	1.교대A1~ 교각P6 슬래브 철근 뒷손보기 2.STA0+000~STA0+123.00(좌) L형옹벽 벽체 습윤양생 3.교각P8 존치구간 강교 표면처리 4.교대A1~ 교각P6 슬래브 상부 집수구 부분설치 5.STA0+000~STA0+123.00(우) L형옹벽 기초철근 배근/ 토공	79
14	선사로~고덕지구간 도로확장공사	B=8m→25m, L=3.72km	354	2009-01-06	2015-12-31	1. 2+120,2+240 날개벽,3+190 도로수 기초 검측 및 콘크리트 타설 2. 부체도로#2 횡배수관 거푸집 탈형 및 되메우기 3. 가재골 빗물받이 연결관 설치 및 천공,관절단, 집수정 연결관 매설 4. 부체도로#1 토공정리 및 1+080 도수로 터파기 5. 1+280 토공정리 및 다짐, 부체도로#1 포장면 거푸집설치 6. 2+740~840법면절취 7. 생태육교 벨마우스 철근가공 설치 및 거푸집작업 8. 우기대비 성토법면 천막작업 및 배수로 정비	68
15	신사사거리~고양시계간 도로개설공사	L=867m, B=4차로(터널 2개소)	240	2012-12-27	2015-12-26	● 터널공사 1. 개착터널(서울방향) 1)시점 - 거푸집해체 - 개착터널 외부방수작업 ● 배수 및 옹벽공사 1. 배수공 1)시점 - 통로박스 바닥정리 2. 옹벽공사 1)종점 - 보강토 연장 L형옹벽 비계설치 - 보강토 옹벽 블록쌓기	79
16	용비교~행당중간 도로개설공사	도로개설 L=718m, B=5~6차로	263	2007-03-22	2015-12-31	○구조물공 - 종방향 신축이음장치 설치 - A1,A2 포장 ○부대공 - 교통안전시설물 순찰 및 정비	88
17	월드컵대교 건설공사	L=1,980m, B=6차로	1,760	2010-03-22	2015-08-22	■ 7차 발주 준비(작업대기)	24
18	율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사	L=800m, B=4→6차로(지하차도 300m)	253	2010-10-11	2017-12-31	1. 전기실 벽체 및 슬라브 철근 조립 2. 현장정비	48
19	응봉교 확장 및 성능개선 공사	중로아치교 225m, 접속교량 407m (기존교량 철거)	456	2008-10-20	2015-12-31	○구조물공 - 2span 보도난간 거푸집 설치 및 콘크리트 타설 - P5지점 방호벽 운반 및 A2 자재 운반 - 1span 방음터널 트러스 설치 - 3span 주경간 아치부 도장 준비 - 종점부 골재포설 및 다짐 - 2span 난간기초 볼트 용접 - 2span 차량방호책 설치 ○부대공 - 교통안전시설물 순찰 및 정비	91
20	천호대로(광나루역) 확장공사	도로확장 L=900m, B=10차로(지하차도,옹벽)	399	2010-10-11	2015-12-31	- STA.0+150~180(좌) 보도부 토공작업 - STA.0+200(우) 상수도 C-Line D1000 배관 및 접합 - STA.0+220~780(중앙부) 토공 깎기 / 암상차 - STA.0+260~760(좌) 구조물 내부 청소 - STA.0+620~650(좌) 우수관 D600 되메우기	57
21	성암로 병목구간 개선공사	도로확장 및 개선 폭2→4차로, 연장 450m	23	2014-02-23	2015-12-31	-현황측량 -종점부 현장정리	78
22	잠실역 버스환승센터 조성사업	버스환승센터(A=19,797㎡, 지하1층) 환승정류장(8면), 버스주차장(23면)	828	2014-05-28	2016-09-27	1.교통처리 4~11단계 1,2단 가시설 설치 2.사거리 어스앙카구간 토류판설치 3.교통처리 4~11단계 토사집토 및 반출 4.지장물(통신관)매달기 5.Type-9 3단벽체철근조립 및 거푸집설치	39
23	도시고속도로연결램프(정릉길) 설치공사	신설램프 120m, 본선확장 82m	122	2013-12-01	2016-12-31	o P3 기초 되메우기 o 현장정리	8
24	신림~봉천터널 도로건설공사(2공구)	L=2.48km	1,690	2010-10-08	2017-12-31	□ 연직갱 굴착 - 가설계단 설치 - 발파 천공 - 버럭 반출	21
25	장안교(구교) 성능개선공사	교량성능개선 (폭17m 연장218m)	150	2014-12-10	2016-12-15	유관기관 협의 중(하천점용허가)
26	서대문고가철거공사	고가철거1개소(폭11.5 연장374) 등	38	2014-12-08	2015-07-07
	건 축 부	6개 공사장				2
27	IT COMPLEX 건립공사	지하7층, 지상21층(연면적 81,956㎡)	1,834	2009-04-03	2015-10-06	대림직원 출역 현황(총8명) 건축1명,설계1명,전기1명,설비1명,안전1명,공무2명,관리1명 1.건축 대민동 -2층 SSD하부 사춤 -14~16층 문틀 도장, 2층 기둥, 벽체 도장 -3층 고정식 의자 설치 전문동 -FSD, SD문짝 설치 -3층 SSD하부 사춤 -18층 AC플로어 설치 -17~19층 문틀 코킹 -12층 고정식 의자 설치, 13층 방음시창 설치 -각층 SGP도어설치 지하층 -지하2층 바닥석재 시공, 지하1층 양중 -지하7층 UPS실 및 지하 각층 ETPS실 -지하7층 상황실 도장 -지하1, 3~6층 홀 벽체 도장, 각층 공용화장실 및 코어 유리 코킹 -지하1층 천정그라스크로스 설치 2.설비 -지하2층, 대민동7층 SP 및 소화배관공사 -지하2층, 대민동3층 덕트공사 -지하1,2층, 대민동1층, 전문동 13,18, 19층 배관공사 -대민동 공조실, 기계실 자동제어공사 3.전기 -전문동 각층 소방관련 입선 -대민동5층, 전문동5층 노출배관공사 -전문동 13층 시스템 박스 모듈라잭 설치, 16~21층 출입통제 설치 -대민동 14층 스크린 설치 -전문동6,7층 시스템박스 설치 -지하7층 케이블 정리, 단말처리,대민동14~9층 등기구 설치 4.토목 -동측, 서측 맨홀 두부 정리 및 관보호공 시공	92
28	돈화문 국악예술당 신축공사	지하3층 / 지상1층, 연면적 1,800㎡	54	2013-12-17	2015-11-30	1. 현장정리정돈 2. 안전시설물 설치 및 정비 3. 지하2층 슬라브 거푸집 설치 4. 지하2층 슬라브 철근 가공 및 조립	62
29	서울과학관건립공사	지하1층, 지상3층(연면적 12,330㎡)	99	2014-01-13	2016-01-12	1. 철근콘크리트공사 - 상설전시실#3 SC~RC 보 거푸집 제작 및 설치 - 계단실#2,3 거푸집 조립 - 지붕층 상설전시실#2 보 철근 가공 및 조립 - 상설전시실#2 해체 자재 정리 2. 습식공사 - 지하층 화장실 외벽 6&#034; 블럭쌓기 - 전기실 블럭 자재 양중 3. 시스템 - 중앙홀 시스템동바리 정리 4. 철골공사 - 교육실구간 지붕층 Deck Plate 자재 양중 및 설치 5. 직영 - 현장 내 안전로프 정비	20
30	양천주민편익시설 리모델링 및 증축공사	지하3층, 지상1층(연면적 5841㎡)	126	2014-12-01	2016-06-30	현장정리 및 안전시설물 설치 기초 구조검토 철골공사 - 철골 세우기 준비 작업	30
31	재사용플라자건립공사	지하2층,지상5층(연면적16,529㎡)	444	2015-01-15	2017-01-14	○ 도면검토 현장 및 현장주변 정리 안전시설물 정비 ○ 피스, 보걸이 제작 이음작업 및 이동 ○ 가시설 공사 (1단 띠장설치 작업및 보걸이 설치) ○ 터파기 (매립폐기물 집토및 정리작업 병행) ○ 매립폐기물 반출로 인한 공사 지연	11
32	서울시어린이 병원 건립공사	지하2층,지상5층(연면적11,950㎡)	235	2013-01-02	2017-04-30	1 서쪽 및 남쪽 토류판 설치작업 2 남쪽 및 동쪽 3단 띠장 설치작업 3 암 발파 및 암 반출작업, 암 소할작업 4 동쪽 Soil Nailing부분 치환작업, 법면시공 5 현장정리 작업	49
	설 비 부	1개 공사장
33	서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업	분뇨처리용량 : 4,000㎥/일	635	2012-11-15	2015-11-09	◆ 토목공사 -. 지하1층 SEC1 DA#4 외부방수 -. 지하1층 SEC1 DA#6 벽체 철근조립 -. 지하1층 SEC2 슬라브 거푸집설치 및 철근가공 -. 지하1층 SEC2 시스템동바리 설치 -. 지하1층 SEC2 내벽 면정리 ◆ 전기공사 -. 지하2층 트레이브라켓작업 -. 지하3층 노출배관 및 케이블트레이작업 ◆ 기계설비공사 -. 지하2층 농축기실, 전처리실 배관설치 -. 지하2층 탈취배관설치 ◆ 건축기계설비공사 -. 지하2층 SP 배관, 위생배관 및 덕트배관, 슬리브설치 -. FRP 환기배관준비 ◆ 탈취설비공사 -. 탈취덕트 지지대 및 배관설치작업	68
	방재시설부	7개 공사장
34	신월빗물저류 배수시설등 방재시설 확충공사		954	2013-05-27	2016-05-25	- 저류배수터널 : STA.164+15.1~164+19.7 상반 장약 및 발파(2회) : STA.164+15.1~164+19.7 상반 버력인양 및 반출, 부석정리 및 B/K작업, 숏크리트 타설(주간) : 상반 천공(STA.164+12.8~164+15.1) 및 버력인양 및 반출, 부석정리 및 B/K작업, 숏크리트 타설, 락볼트 설치(야간) - 유지관리수직구 : 가설계단 설치, 버럭인양 및 반출 - 환기수직구 : 수발공 설치 - 고지수직구 : 갱구부 3차 굴착 및 숏크리트 타설 : 2차 락볼트 설치 - 저지수직구1 : 접속부 3차 굴착 및 숏크리트 타설 - 저지2횡갱 : STA.0+3.8~0+0.8 하반 지보설치 및 숏크리트 타설 : STA.0+7.4~0+3.8 상반 굴착	16
35	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업	고도처리 115만톤/일(시설현대화 36만톤/일)	2,786	2009-11-09	2015-08-09	1) 토목 □ 시설현대화 - 소화조 2-1구간 1단벽체 철근조립 및 헌치 거푸집 해체작업 - 소화조 2-2구간 1단벽체 콘크리트 타설 - 분배수로 4-2구간 공동구 바닥슬래브 거푸집 설치작업 - 초기우수저류조 4-3구간 내부 동바리 및 거푸집 해체작업 - 반류수처리시설 4-3구간 1단벽체 철근조립 및 거푸집 설치작업 - 생물반응조 5-4구간 내부 외부 비계 해체작업 - 생물반응조 5-4구간 바닥슬래브 철근조립 및 거푸집 설치작업 - 이차침전지 6-2구간 공동구 바닥슬래브 콘크리트 타설 - 이차침전지 6-3구간 침전조 지하1층 슬래브 거푸집 설치 및 벽체 철근조립 - 이차침전지 6-4구간 공동구 지하2층 벽체 거푸집 설치작업 - 총인처리시설 8구간 터파기 및 토사 외부 반출작업 - 총인처리시설 8-1구간 PHC파일 천공 준비작업 □ 부대공 - 현장 주변 정리 및 청소/ 안전시설물 설치/ 양수기 관리작업 2) 기계 - 시설현대화 7차분 시공계획서 및 기자재 제작도서 검토 3) 전기 - 시설현대화 분배수로 4-2구간 공도구 전열 바닥매립 배관작업 4) 안전교육 [5RP] - 추락 : 작업발판 연결상태 확인 철저! / 충돌 : 신호수 배치 철저! 감전 : 충전부 절연조치 철저! 낙하 : 소자재 인양함 사용 철저! / 화재 : 불티방지대 설치 철저! 5) 금일 위험 작업 구역 - 초기우수저류조 4-3구간 내부 동바리 및 거푸집 해체작업	39
36	중랑물재생센터 고도처리시설 및 시설현대화	- 고도처리시설 개량 88만톤/일 - 시설현대화사업 25만톤/일	3,059	2009-02-13	2016-02-28	[토목공사] - 초기우수 처리시설 상부 공동구.전기실 모체침투방수 - 초기우수 처리시설 유출수로 에폭시방수 - 초기우수 처리시설 유지관리도로 벽체 거푸집 및 동바리 해체 - 총인처리시설L 내부 벽체 거푸집/동바리 해체 및 정리 - 총인처리시설R 여과시설 벽체,기둥 철근/거푸집 조립, 동바리 및 발판 설치 - 총인처리시설R 여과시설 외부 비계 설치 - 총인처리시설R 방류수조 벽체 철근 조립 - 도달기지#1 되메우기 및 가시설 해체 - 추진기지#1 반력벽 해체 [기계공사] - 시설현대화 질산화조 R 유입배관 작업 - 시설현대화 질산화조 L 공기배관 작업 - 시설현대화 기계실 중층 급수배관 설치작업 - 초기우수처리시설 산기관설치 [전기공사] - 기계실 노출배관 - 생물여과 질산화조R 케이블트레이 설치	73
37	탄천물재생센터 복개공원(4단계)공사	복개: A=33,978㎡, 공원화: A=36,920㎡	261	2013-10-01	2016-09-29	PC부재(기둥) 반입 및 설치 PC기둥 무수축몰탈 주입 상부현장 철근가공 및 거푸집조립 ① PC제작 기둥(제작 - / 누계 1351)설치(설치 20 / 누계 1213) 보 (제작 - / 누계 2437)설치(설치 - / 누계 1828) 슬라브 제작 (제작 500 / 누계 23326 ㎡ ) 설치 (설치 - / 누계 3971 EA)	61
38	공릉2빗물펌프장 신설및 면목4동배수관로	공릉2빗물펌프장 :펌프장 신설 520㎥/min,유입관리 BOX 273m - 면목4동 배수관로 :배수관로D1,500mm*2련, L=143m	52	2013-01-08	2016-07-07	◎공릉2빗물펌프장 빗물펌프장 터파기 및 가시설 설치(띠장 1단) 기존간이펌프실 코어천공	48
39	합정외 1 빗물펌프장 증설공사	합정펌프장 증설 : 218→378㎥/min 중동펌프장 증설 : 330→540㎥/min	47	2013-01-04	2016-04-30	중동펌프장 토출관 설계 및 시공 일정 준비 수방관련 현장 확인 합정펌프장 -지장가옥 공사착공 지연 -설계도서 검토	50
40	도림천 상류 관악산 저류조 설치공사	서울대학교 정문 앞 광장 저류조 40,000㎥ 서울대학교 내 분산형 저류조 25,000㎥ 임시저류조(강남순환 6-1공구외1개소) 130,000㎥	339	2012-06-13	2017-05-31	서울대 정문 - 철근 가공 및 조립 작업 - 중앙파일 청소 작업	75
	도시철도국	14개 공사장
	도시철도토목부	10개 공사장
48	916공구	L=1,1km(정거장 2개소)	1,526	2008-06-02	2016-03-01	□ 코엑스몰 연결출입구 H빔 매몰부 할석 및 미장, 방수 가시설 접속부 기존파일철거 및 보조파일 설치 띠장, 버팀보 철거 및 인양, 자재정리 □ 기타 보도정비 및 점검 지적사항 조치(928) 상수도 보수 및 보강작업	99
49	918공구	L=1.291km(정거장 1개소)	1,377	2010-02-19	2016-02-17	▶ 터널1구간 - 터널 인버트 철근조립 및 가공/운반 - 터널 인버트 콘크리트 타설 ▶ 개착1구간 - 9~10span 헌치 거푸집 설치 ▶ 931정거장 - 2,3span 상부슬래브 벽체 되메우기 정리 및 버팀목 설치 - 10span 지하1층 상부슬래브 멍에,장선,합판 거푸집 설치 - 12span 지하2층 중간슬래브 철근 조립 - 정화조 지하1층 벽체1단 거푸집 설치 - #3작업구 하부 가시설 자재 인양 ▶ 개착3구간 - 22span 이동통로 변경, 덕트 개구부 덮개 설치 - 23span 상부슬래브 철근 조립 - 24,25span 수직,수평 앵글 해체 - 25~27span 되메우기 정리 및 버팀목 설치 - 34span 시스템동바리 설치 ▶ 지중(동공)점검 - 공사구간 순찰, 육안점검	62
50	919공구	L=1.2km(정거장 2개소)	2,041	2009-12-31	2015-12-29	- 집수정 펌프 가동 상태점검 ▣ 931S1 환기구 - 지하 2층 중간슬래브 철근조립 및 동바리 보강 - 지하 2층 벽체 거푸집 보강 ▣ 932정거장 - 시점(931S2E2) 4단 사버팀보, 2단 횡버팀보 설치 - 지하 1층 기둥 거푸집 해체(4Span) - 지하 1층 토사피트, 면벽 콘크리트 타설(5, 6Span) - 구조물 매몰부 면정리 및 면벽 거푸집 설치(7Span) - #2 연결통로 1, 2단 사버팀보 해체(8Span) - 중앙파일 절단(11Span) - #1, 2 출입구 토류판 설치 및 어스앵카 띠장, ㄷ-형강 설치 - #3, 4 출입구 2단 버팀보 보강재 설치, 계단설치 ▣ 933정거장 - 지하 3층 보호벽 거푸집 설치 및 콘크리트 타설(3Span) - 지하 1층 상부슬래브 양생(5Span) - 지하 1층 기둥 콘크리트 타설 및 154kV 깨기, 매달기(7Span) - 지하 1층 슬래브 동바리 설치 및 상수도관 매달기(7Span) - 지하 1층 상부슬래브 철근조립 및 동바리, 거푸집 설치(9Span) - 지하 1층 중간파일 해체(9Span) - 지하 1층 슬래브 동바리 해체(10Span) - #1, 2 출입구 어스앵커 띠장 설치 및 사버팀보 설치 - #5, 6 출입구 주형받침보 보강, 기존구조물 깨기, 도시가스 매달기 - #5, 6 출입구 어스앵커 천공 ▣ 쉴드터널 - 갱내 발판, 레일 및 레일슬리퍼 제거 - 커터헤드 육성보강 및 커터씰 반출	41
51	920공구	L=1.39km(정거장 1개소)	1,532	2009-12-31	2015-12-29	[1환기구] -보호벽 거푸집 조립 -중앙파일 방수철판 용접 [쉴드 TBM 구간-BOX1] -1구간 인버트 철근 가공 및 조립 -1구간 수전설비 해체 및 이동 -2구간 쉴드TBM 조립 [BOX1~2환기구] -보호벽 거푸집 해체 및 정리(1-2span) -BOX1 기초 철근 이동 및 조립(3span) [934정거장~BOX2구간] -정거장 바닥 면정리 및 시트방수(1span) -정거장 1단 벽체 거푸집 조립(3span) -정거장 보조파일 제작(7-9span) -정거장 출입구 지장물 조사 및 복구(1,2번) -3환기구 내부벽체 거푸집 조립(1span) -BOX2 보호벽 거푸집 해체(1~3span)	55
52	921공구	L=1.74km((정거장 2개소)	1,707	2009-12-31	2015-12-29	(935 정거장) ■ 본선 및 정거장 공사 - 동바리 해체 작업(1~2스판) - 상부슬라브 방수 면정리 작업(3스판) - 중앙파일 및 ㄷ-형강 해체작업(6스판) - 지역난방관 받침 기둥 철근 조립 작업(5스판) (936 정거장) ■ 본체구조물 - 지하2층 슬라브 철근 및 거푸집 설치(3스판) - 지하1층 가시설 버팀보 해체 작업(4스판) - 벽체 거푸집 설치 작업(자전거주차장) - 벽체거푸집 해체 작업(연결통로) ■ 환승통로 - NTR 강관압입 및 굴진 ■ NATM터널 - 상행선 (보도헌치 콘크리트 타설작업) - 하행선 (라이닝 폼 조립작업) (쉴드터널) ■ 쉴드발진부(본선) - 쉴드터널 굴진 및 세그먼트 조립 - 침목 및 레일 설치작업	52
53	922공구	L=1.47km(정거장 1개소)	1,317	2010-09-16	2016-03-17	■ 936S2E2 - 지하2층 1단벽체 거푸집 해체 ■ 937정거장 - 1SPAN 중간슬라브 동바리 설치 - 3~4SPAN 측벽 5단 띠장해체(상선) - 3~4SPAN 지하1층 1단벽체 되메우기(하선) - 5SPAN 지하1층 1단벽체 거푸집 설치 - 6SPAN 지하1층 대합실 기초 거푸집 해체 - 9SPAN 중간슬라브 및 마감벽 동바리 보강 - 9SPAN 중간슬라브 철근조립 ■ 937S1E1 - 작업사항 없음 ■ 본선 집수정 - 작업사항 없음 ■ 본선 1터널 1.상선 - 인버트 철근가공 및 조립(17~20span) - 보도헌치 거푸집 설치(9~16span) 2.하선 - 라이닝폼 이동 ■ 본선 2터널 1.상선 - 영구갱문 철근조립 2.하선 - 현장정리 ■ 본선 3터널 1.상선 - 라이닝 콘크리트 타설(37span) 2. 하선 - 라이닝 콘크리트 타설(42span)	62
54	923공구	L=1.7km(정거장 1개소)	982	2010-09-20	2016-03-21	□ 본선터널 1. 현장정비 □ 본선1구간(937S2) 1. 1span 중간슬라브 철근조립(40k 210~232) 2. 17~18span 상부되메우기(40k 498~516) 3. 21~22span 4단 버팀보 해체(40k 564~597) 4. 23~24span 측벽 채움콘크리트 타설(40k 597~633) 5. 26span 기둥 및 상부슬라브 내벽 거푸집 설치(40k 651~670) □ 938 정거장(937E2, 938E1) 1. 27span 5단 버팀보 해체(40k 670~696) 2. 28span 중간슬라브 철근조립(40k 696~714) 3. 31span 상부슬라브 동바리 설치(40k 752~769) / 4. 34~35span 지하2층 2단벽체 방수(40k 805~837) 5. 37~38span 지하1층 1단벽체 방수(40k 857~890) / 6. 39span 상부슬라브 철근조립(40k 890~907) 7. 39span 상부슬라브 동바리 보강 및 2단벽체 거푸집 설치(40k 890~907) / 8. 환기덕트#3 슬라브 철근조립 □ 본선2구간(938S1) 1. 종점부 연장구간 주형보 및 복공판 설치 2. 복구#5(41k 195~285) 차선도색 및 가드휀스 설치	60
55	우이~신설 궤도공사	L=23.4km(정거장 1개소)	198	2009-09-15	2016-11-30	[1공구 차량기지~L03정거장종점] - 0km145.3~1k763.0 L=1km908.3 - * 전회콘크리트 타설 완료구간 가설재 해체 및 양생 * 현장콘크리트 타설준비(07/22.수) sco 분기기 및 인상선 선형정정,배수로 설치,콘크리트 타설전 검측 * 차회 현장콘크리트 타설준비(7/29.수) 건넘선 2조 침목배열 및 궤광조립 * L01정거장 #8 건넘 침목 및 레일 배열 [2공구 L03정거장종점~L07정거장종점] - 1km763.0~4km995.8 L=3km232.8 - * 콘크리트 타설구간 양생 및 가설재 이동 * 현장 콘크리트 타설 1k601~2k901 L=490m 상선 L03정거장~L03환기구(07/21.화) 현장 콘크리트 타설 07:00~ 남동 레미콘 수직관 위치 L03정거장 예정67대 * L04정거장~L04환기구 상선(07/28.화) 체결구 및 가설재 배열,조립,1차 LEVEL 정정 [3공구 구간 L07정거장종점~L10정거장종점] - 4km995.8~8km167.5 L=3km171.7 - * L05~L07정거장 장대레일 운반 [4공구 구간 L10정거장종점~과업종점] - 8km167.5~11km262.23 L=3km094.73 - * 현장 콘크리트 타설 완료 -작업 없음	57
56	하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사	L=628m(정거장 1개소)	111	2015-03-17	2019-03-28	-
57	하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사	L=471m(환기구1개소)	386	2015-03-30	2018-07-10	-
	도시철도사업부	4개 공사장
58	우이신설 1공구	L=1.9km(정거장 3개소)	1,070	2009-09-15	2016-11-30	[토목] ○차량기지 - 기능실 환기구 외벽 거푸집 조립 - 상부 슬래브 되메우기 - #1환기구 및 폐수처리시설 내부 거푸집 및 철근조립 - 유치선 이동통로 거푸집 제작 - 차량 반입구 옆 복공판 해체 ○L01정거장[견인차보관소] - #1외부출입구 기초철근조립 - #4환기구 덕트 벽체 철근조립 - 3SP 측벽 되메우기 ○본선2구간[이마트앞] - 10~12SP 2단 벽체 되메우기 - 4~5SP 1단버팀보 해체 ○L02정거장[GS주유소앞] - 기능실 B동 2단벽체 외부거푸집 해체 및 정리 - 기능실 A동 보조파일 설치 ○L03정거장[연탄굴뚝앞] - 기능실 상,하부 슬래브 H파일 치핑 및 면정리 - 승강장 배면 기둥거푸집 제작 및 설치 - 승강장 하부 차수턱 철근조립 및 거푸집 설치 - 자재정리 및 반출, 청소 [전기] ○차량기지 - 지하 1, 2층 전력간선 케이블 포설 [기계] ○차량기지 - 승객용 E/V 설치 - 지하 1층 공조기계실 덕트 설치 - 지하 2층 덕트 설치 및 보온 ○L02정거장 - 본선연결송수구 배관자재 반입 [건축] ○차량기지 - 중정 수성페인트 작업	74
59	우이신설 2공구	L=3.2km(정거장 4개소)	1,157	2009-09-15	2016-11-30	○4정거장[파리바게트 앞] - 주형보 해체 - 계단 거푸집 설치 ○본선4구간[송암교회 앞] - 지장물 복구공 거푸집 해체 ○5정거장[화계사사거리 앞] &lt;건축&gt; - 지상층 내부 형틀자재 정리 및 청소 - 외부 선내리기 및 앙카시공 - 외부비계 수정작업 &lt;전기&gt; - 지상4층 통신기계실 전등 배관 작업 - 본선터널 트레이 작업 &lt;기계&gt; - 본선터널 연결송수구 배관작업 ○6정거장[삼성래미안아파트앞] - 지장물 복구공 기동 거푸집 설치 &lt;기계&gt; - 본선터널 연결송수구 배관작업 - 정거장 기능실 소화배관 마무리작업 ○7정거장[솔샘동물병원앞] - L07S1(급기) 보조파일 설치 - 지장물 복구공 철근 조립,L06S2(급기) Slab 거푸집 설치 - 외부 출입구#1 2단 벽체 철근 조립 &lt;건축&gt; - 지붕층 바닥 보형틀 및 동바리 설치 - 지붕층 데크설치 &lt;전기&gt; - 지상4층 전등배관 작업 - 지상4층 소방배관 작업 &lt;기계&gt; - 본선터널 연결송수구 배관작업 - 정거장 기능실 소화배관 작업	77
60	우이신설 3공구	L=3.1km(정거장 3개소)	967	2009-09-15	2016-11-30	○ L07E환기구(옥이슈퍼앞) 본선1터널 - 현장자재정리 L07E환기구 - 가시설 해체 및 자재 정리 ○ L08E환기구(풍림아파트앞) L08E환기구-5단벽체 철근 배근 ○ L09E환기구(미래전자앞) 본선5터널-현장자재정리, 본선6터널-현장자재정리 L09E환기구 - 지하2층 확폭부 채움 콘크리트 타설 ○ L08정거장(미양초등학교앞) 본선 및 정거장 환기구 벽체 철근 배근 출입구#2 토사 집토, 환기구 파일 천공 위치 줄파기 정화조 수조 내부 청소 ○ L09정거장(청수교회앞) 2,3스판 지하2층 차수턱 거푸집 해체 및 자재정리 출입구#1 벽체 동바리 및 슬라브 설치 , 정화조 차수턱 거푸집 설치 ○ L10정거장(아리랑고개앞) 3스판 지하1층 차수턱 거푸집 설치 출입구#2 채움 거푸집 설치, 외부출입구#2 급.배기 방수 ○건축공사 L08 정거장 블럭반입 및 쌓기,견출 및 면갈이 L09정거장 도막방수,	74
61	우이신설 4공구	L=3.1km(정거장 3개소)	1,006	2009-09-15	2016-11-30	○ L10E 환기구 - 수직구 1단벽체 거푸집보강 ○ L11E 환기구 - 기초철근조립 ○ L12E 환기구 - 터널전선 및 배전판 정비 - 터널 유도동판 도장 ○ L11 정거장 - 동바리 및 가시설해체 - 환승통로 토사굴착 ○ L12 정거장 - 정거장 정비 - 콘크리트 방수턱 거푸집설치(건축) ○ L13 정거장 - 지장물매달기 해체 - 복공판 및 주형보 반출	75

9월 기동불시(정기) 안전점검 대상공사장