연번	공사명(공구명)	공사개요	도급비 (억원)	착공일	준공 예정일	공정(%)	비고
계	도시기반시설본부	59공사장	토목부23건축부6,설비부1,방재시설부15시철도 토목부9, 사업부4, 설비부1
소계	시 설 국	45공사장	토목부23건축부6,설비부1,방재시설부15
	토 목 부	23 공사장
1	강남순환도시고속도로(4공구)	L=2.48km, B=4~6차로	1,673	2001-12-29	2016-05-19	60.2
2	강남순환도시고속도로(5공구)	L=5.1km, B=6~8차로	4,029	2007-11-20	2016-05-19	93.0
3	강남순환도시고속도로(6-1공구)	L=1.13km, B=3~4차로	1,442	2009-05-20	2016-05-19	89.8
4	강남순환도시고속도로(6-2공구)	L=2.4km, B=8차로	1,151	2009-04-01	2016-05-19	91.2
5	강남순환도시고속도로(7-1공구)	L=1.04km, B=6차로	685	2010-06-01	2016-05-19	81.4
6	강남순환도시고속도로(7-2공구)	L=2.7km, B=6차로	1,861	2008-04-01	2016-05-19	90.1
7	강남순환도시고속도로(8공구)	L=7.96km, B=4~10차로	2,215	2002-07-03	2018-07-30	27.1
8	도시고속도로연결램프(정릉길)설치공사	신설램프 120m, 본선확장 82m	122	2013-12-01	2016-12-31	30.0
9	남부순환로-오정대로간 도로개설공사	도로개설:B=40m L=1.23㎞(폭40m, 교량1개소)	98	2010-09-29	2016-06-30	80.0
10	동부간선도로 확장공사(2공구)	도로확포장 : L=3.2km(지하차도 2개소, 옹벽)	1,705	2008-12-30	2017-12-31	61.4
11	동부간선도로 확장공사(3공구)	도로확포장 : L=2,2km(지하차도 2개소 등)	558	2008-02-15	2017-12-31	58.2
12	서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사	고가철거 및 신설 L=753m	171	2011-01-06	2016-04-30	91.3
13	선사로~고덕지구간 도로확장공사	B=8m→25m, L=3.72km	354	2009-01-06	2016-12-31	75.3
14	신사사거리~고양시계간 도로개설공사	L=867m, B=4차로(터널 2개소)	240	2012-12-27	2016-02-26	93.3
15	월드컵대교 건설공사	L=1,980m, B=6차로	1,760	2010-03-22	2020-08-30	27.0
16	율곡로 창경궁앞 도로구조개선공사	L=800m, B=4→6차로(지하차도 300m)	253	2010-10-11	2017-12-31	48.2
17	응봉교 확장 및 성능개선 공사	중로아치교 225m, 접속교량 407m	456	2008-10-20	2016-06-30	95.1
18	천호대로(광나루역) 확장공사	도로확장 L=900m, B=10차로(지하차도,옹벽)	399	2010-10-11	2017-12-31	95.1
19	잠실역 버스환승센터 조성사업	버스환승센터(A=19,797㎡, 지하1층) 환승정류장(8면), 버스주차장(23면)	828	2014-05-28	2016-09-27	25.2
20	신림~봉천터널 도로건설공사(2공구)	L=2.48km	1,690	2010-10-08	2017-12-31	23.1
21	장안교(구교) 성능개선공사	교량성능개선(폭17m 연장218m)	150	2014-12-10	2016-12-15	36.6
22	목동교 성능개선공사	교량성능개선(폭20m 연장240m,DB-18→24)	102	2015-08-06	2017-08-11	47.1
23	서울역주변 교차로 개선공사	교차로개선 4개소, 삼거리신설 1개소	10	2015-08-12	2016-05-30	70.0
	건 축 부	6개 공사장
24	돈화문 국악예술당 신축공사	지하3층, 지상1층, 연면적 1,800㎡	54	2013-12-17	2016-03-30	78.4
25	서울과학관건립공사	지하1층, 지상3층 연면적 12,330㎡	99	2014-01-13	2016-01-12	65.5
26	양천주민편익시설 리모델링 및 증축공사	지하3층, 지상1층 연면적 5841㎡	126	2014-12-01	2016-06-30	39.5
27	재사용플라자건립공사	지하2층, 지상5층 연면적16,529㎡	444	2015-01-15	2017-01-14	19.9
28	서울시어린이 병원 건립공사	지하2층, 지상5층 연면적11,950㎡	235	2013-01-02	2017-04-30	49.1
29	주얼리비지니스센터 건립공사	지하2층, 지상2층 연면적443㎡	14	2015-11-16	2016-12-15	0.1
	설 비 부	1개 공사장
30	서남분뇨처리시설 증설 및 현대화사업	분뇨처리용량 : 4,000㎥/일	635	2012-11-15	2016-06-30	80.2
	방재시설부	15공사장
31	신월빗물저류 배수시설등 방재시설 확충공사	수직구:6개소(저지2,고지1,환기1,유출1,유지관리1) - 저류:L=3.629km,D=10.0m 유도:L=1.097km,D=5.5m	954	2013-05-27	2016-05-25	21.7
32	서남물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업	고도처리 115만톤/일(시설현대화 36만톤/일)	2,786	2009-11-09	2018-12-31	48.9
33	중랑물재생센터 고도처리시설 및 시설현대화	고도처리시설 개량 88만톤/일 시설현대화사업 25만톤/일	3,059	2009-02-13	2016-02-28	80.0
34	탄천물재생센터 복개공원(4단계)공사	복개: A=33,978㎡, 공원화: A=36,920㎡	261	2013-10-01	2016-09-29	76.8
35	공릉2빗물펌프장 신설 및 면목4동배수관로	공릉2빗물펌프장 :펌프장 신설 520㎥/분, 면목4동:배수관로D1,500mm*2련, L=143m	52	2013-01-08	2016-07-07	52.0
36	도림천 상류 관악산 저류조 설치공사	서울대학교 정문 앞 광장 저류조 40,000㎥ 서울대학교 내 분산형 저류조 25,000㎥	339	2012-06-13	2017-05-31	73.5
37	잠원2빗물펌프장 신설공사	잠원2빗물펌프장 :펌프장 신설 1,400㎥/분, 집수조 V=15,500㎥	51	2013-01-03	2016-12-31	38.8
38	경의선 숲길공원조성	길이(3.48㎞) 면적(84,268㎡)	118	2013-09-30	2016-03-31	72.0
39	경춘철교 정비공사	철교 길이(176.5m) 폭(6m)	51	2015-01-06	2016-05-23	0
40	경춘선 폐선부지 공원조성공사	길이(1.1㎞) 면적(53,860㎡)	54	2015-10-06	2016-10-05	0
41	용두3 및 신이문 빗물펌프장 신증설공사	유입관거 및 펌프4대 - 용두3	39	2013-01-03	2016-12-31	75.0
42	합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사	합정펌프장 증설 : 218→378㎥/min 중동펌프장 증설 : 330→540㎥/min	47	2013-01-04	2016-04-30	50.0
43	제물포터널 민간투자사업(1공구)건설공사	연장 4.28km(지하차도 터널 설치)	2,304	2015-10-16	2020-10-15	0.1
44	제물포터널 민간투자사업(2공구)건설공사		3,018	2015-10-16	2020-10-15	0
45	서초역~방배로간 도로개설공사		4,415	2015-10-20	2019-01-31	3
	도시철도국	14개 공사장	도시철도토목부9, 도시철도사업부4 도시철도설비부1
	도시철도사업부	4개 공사장
46	경전철 우이신설 1공구	L=1.9km(정거장 3개소)	1,070	2009-09-15	2016-11-30	87.5
47	경전철 우이신설 2공구	L=3.2km(정거장 4개소)	1,157	2009-09-15	2016-11-30	85.4
48	경전철 우이신설 3공구	L=3.1km(정거장 3개소)	967	2009-09-15	2016-11-30	78.7
49	경전철 우이신설 4공구	L=3.1km(정거장 3개소)	1,006	2009-09-15	2016-11-30	81.7
	도시철도토목부	9개 공사장
50	지하철9호선 918공구	L=1.291km(정거장 1개소)	1,377	2010-02-19	2016-02-17	72.0
51	지하철9호선 919공구	L=1.2km(정거장 2개소)	2,041	2009-12-31	2018-05-30	47.6
52	지하철9호선 920공구	L=1.39km(정거장 1개소)	1,532	2009-12-31	2018-05-30	61.1
53	지하철9호선 921공구	L=1.74km((정거장 2개소)	1,707	2009-12-31	2018-05-30	58.4
54	지하철9호선 922공구	L=1.47km(정거장 1개소)	1,317	2010-09-16	2016-03-17	72.2
55	지하철9호선 923공구	L=1.7km(정거장 1개소)	982	2010-09-20	2016-03-21	66.8
56	경전철 우이~신설 궤도공사	L=23.4km(정거장 1개소)	198	2009-09-15	2016-11-30	92.0
57	하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사	L=628m(정거장 1개소)	738	2015-03-17	2019-03-28	0
58	하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사	L=471m(환기구1개소)	386	2015-03-30	2018-07-10	0
	도시철도설비부	1개 공사장
59	경전철 우이~신설 시스템,송변전,전차선,통신공사		46	2009-09-15	2016-11-30

2월 안전점검 대상공사장