“내 삶의 든든한 이웃, 행복공동체 노원”
		노원구
수신	서울특별시장(체육진흥과장)
(경유)
제목	야간 시민운동을 위한 인프라 구축 사업 변경승인 요청

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 노원구 교육지원과-3829(2014.4.15)호와 관련하여 공릉중학교에서 추진중인‘야간 시민운동을 위한 인프라 구축 지원사업’에 아래와 같이 당초 사업계획에 분야별 투자금액 변경사항이 발생하여 「서울특별시 보조금 관리조례」제19조에 따라 귀 청의 변경승인을 요청하오니, 실시설계, 입찰, 장마 등의 제요인을 고려하여 방학중 공사가 진행될 수 있도록 신속하게 심사하여 처리하여 주시기 바랍니다.

○ 사정변경 및 승인요청사항

(단위:천원)

사 업 별	변경사항		승인요청 사항	사정변경원인
	당초	변경
운동장 포장	140,000	173,500	33,500천원 증액	운동장 측구, 높이 조정 공정 추가
야간조명	60,000	26,500	33,500천원 감액	조명타워 축소 지주식으로 변경

붙임 : 1. 공릉중학교 변경승인 요청공문 1부.  끝.

							노 원 구 청 장
★주무관										학교지원팀장										교육지원과장
협조자
시행			교육지원과-6692									(	2014.07.18.					)		접수			체육진흥과-8346								(	2014.7.18.					)
우	139-703					서울별시 노원구 노해로431(상계6동 701-1)															/			http://www.nowon.kr
전화		02)2116-3237						/전송			02)2116-4612					/	hskim0608@nowon.go.kr												/	공개