문서번호	물순환정책과-15595
결재일자	2018.8.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★실무사무관	오염총량팀장	물순환정책과장

양평1유수지 상부 체육시설 조성 추진 검토

물순환안전국

(물순환정책과)

양평1유수지 상부 체육시설 조성 추진 검토

양평1 유수지 CSOs 저류조 상부 체육시설(축구장) 조성과 관련,

당초 CSOs 저류조 사업에 반영하여 시행코자 하였으나, 인근주민

들의 설치 반대 민원이 해소되지 않아 재검토 추진코자 함.

□ 체육시설 사업개요

○ 위 치 : 양평1유수지 CSOs 저류조 상부 ○ 주요시설 : 인조잔디 운동장, 조명, 펜스 등 ○ 소요예산 : 1,179백만원 ○ 추진방법 : 양평1유수지 CSOs 저류조 설치 공사와 병행 추진	사업후
	《축구장 설치 조감도》

<양평1유수지 CSOs 저류조 설치공사 개요>

- 위    치 : 영등포구 국회대로 22길 20(양평1유수지 내)

- 규    모 : CSOs 저류조 46,000㎥

- 기    간 : 2016. 12. 5 ~ 2019. 8. 4

- 총사업비 : 35,119백만원(국비 50% + 시비 50%)

※ CSOs(Combined Sewer Overflows) : 합류식 하수관로 월류수

□ 추진경위

○ ‘17.11월 市 당정협의회 건의사항(김정태 도시계획관리위원장)

- CSOs 저류조 사업과 연계하여 상부에 체육시설 설치 추진 요청

- 검토결과 : 수용(사유 : 예산절감 및 지역주민 여가활동 지원 등)

○ 양평1 유수지 생활체육시설 조성 협조 요청(영등포구청)

(영등포구 문화체육과-34942, ‘18.11.28)

○ ‘18년 체육시설 조성사업 관련 설계비 편성

- 설계비용 60백만원(CSOs 저류조 설치사업 예산에 반영)

※ ‘18년 설계 시행, ’19년 상반기 설치(예산담당관과 협의됨)

○ 체육시설 설치에 대한 인근 지역주민의 지속적인 반대

- 지역주민들 저류조 공사 현장 및 영등포구청 방문하여 설치 반대

(반대사유 : 소음 및 주차난, 유료 축구장 우려 등)

- 체육시설 설치할 경우 저류조 및 체육시설 설치공사 저지 의견 피력

○ 관련기관 회의 개최 : ‘18.2.21(물순환정책과, 도기본, 영등포구)

- 원할한 사업 진행을 위하여 영등포구청에서 반대 주민 설득키로 협의

- 영등포구에서는 주민과의 충분한 대화를 통해 의견을 수렴하고, 주민

동의서 제출시 사업 진행(구청장과 주민 비상대책위원회 면담 진행)

○ ‘19년 사업비 예산편성을 위해 영등포구에 업무 협의

(물순환정책과-14005, ‘18.8.3)

- 주민 반대 민원에 대한 확정된 대안이 없어 주민간 합의결과 회신 촉구

○ 업무협의에 대한 영등포구 회신

(영등포구 문화체육과-25091, ‘18.8.24)

- 국민고충위원회 집단민원(1,293명) 접수 및 인근 아파트 주민 등

1,420명 축구장 건립 반대서명 제출 등 현재까지 민원해결 안됨.

□ 향후계획

○ 지역주민들의 상부 체육시설 설치사업 동의가 불투명하므로 ‘19년 사업

예산 편성 보류(영등포구 통보 예정)

○ 자치구의 확정된 요청이 없는 한 당초 양평1유수지 CSOs저류조 사업

공정에 의거 저류조 공사 후 상부는 원상복귀.  끝.