양평1유수지 CSOs 저류조 비점오염저감사업 내용변경 검토

□ 사업 개요

❍ (사업위치) 서울시 영등포구 국회대로 22길 20

❍ (사업기간) 2014.12. ∼ 2019.08

❍ (시설종류 및 용량) CSOs 저류조(46,000㎥)

❍ (사 업 비) 34,941백만원(국비 17,471백만원, 지방비 17,470백만원)

❍ (진행상황) 공사시행(’19.11.8. 기준 공정율 99.85%)

□ 내용변경 요청사항

❍ (총사업비 증액) 당초 34,941백만원에서 35,204백만원으로 증액

- 설비동 위치 변경, 동절기 보온양생비 추가, 물가변동 등 반영

❍ (사업기간 연장) 당초 계획에서 추가된 저류조 상부 생태체육시설 조성공사(서울시 자체사업)에 따라 당초보다 4개월 연장

- 사업완료일 2019.08.04 ⇨ 2019.12.16

□ 검토결과

❍ (총사업비 증액) 협의 불가로 인한 반려

- 완공 연도에는 총사업비의 조정협의는 허용되지 아니함

※ 관련근거 : 총사업비관리지침 제28조

❍ (사업기간 연장) `19.12.16까지 사업기간 연장 승인

- 생태체육시설 조성공사로 인한 시설설치공사가 지연되어 공기 내 공사 및 시설 인계인수 진행이 어려울 것으로 판단