[서식 6]

양평1 유수지 CSOs 저류조 설치 사업 추진계획서

2016. 1.

시․도명	서울특별시	관리지역명

담당자 : 물순환정책과        직명 실무사무관       성명 최형준 (인)

(전화 : 02-2133-3771     Fax : 02-2133-1041)

1. 사업개요

■ 사업목적 및 필요성

○ 사업의 목적

- 하천수질 개선대책으로 강우시 빗물과 함께 유입되는 합류식하수관로 월류수(CSOs)의 관리 필요성 증대

- CSOs 관리의 법적 기준 이행 필요

- 시민들의 생태적으로 건강한 하천조성 요구 증대

- 수질오염총량제 시행으로 우리시가 저감하여야 할 수질오염 물질의 총량과 목표수질 달성 의무 실행

○ 필 요 성

- 물재생센터 수질개선 사업 등을 통해 방류수질을 강화하더라도 오염총량제 목표수질인 BOD 4.1mg/L, T-P 0.236mg/L 이하로 유지하기가 어려운 실정임으로 오염물질 추가 삭감방안으로 CSOs 적정관리 필요

- 관련 연구결과 우리시가 관리하여야 할 CSOs 량은 395만㎥이나 사업량이 방대하여 단계적으로 사업추진이 필요하고, 현재 유수지에서 발생되는 악취로 인해 인근 주민들의 민원이 제기 되고 있는 바, 악취민원 해결과 CSOs 적정관리를 위해 조속한 사업 시행 필요

- 상위 계획인 서울시 하수도정비계획(2009)에서 유수지가 CSOs 관리의 최적지로 CSOs 저류시설 설치 방안이 제시

■ 사업기간

○ 설계기간 : 2014. 12. 23. ～ 2016. 03. 26.

○ 공사기간 : 2016. 05월    ～ 2017. 12월

■ 사업비(총사업비) : 36,540백만원 (실시설계 중 : VE 반영 전 금액)

■ 사업내용 및 규모

사업내용		총사업 규모	총사 업비 (백만원)	년차별 투자소요(백만원)
				전년도까지		‘16년		‘17년
				물량	금액	금액	물량	물량	금액
비점 오염 저감 사업	양평 CSOs 저류조 설치	저류조 46,000㎥	36,540	기본설계 실시설계	1,044	착공	7,754	준공 (46,000㎥)	27,742

2. '16년 사업추진개요

■ 사업대상지역 유역현황 등 주변현황

○ 배수유역 현황

구 분	배수분구	유역면적(ha)	유수지 용량(㎥)	펌프장 용량(㎥/분)
양평1	당산, 문래, 영등포	452.5	115,000	4,080

○ 양평1 빗물펌프장 시설현황

가동수위	정지수위	최고수위	설계빈도	유입관로	유출관로
4.4m	3.8m	6.0m	30년	3.0x2.5x2련, 3.0x2.0x3련, 2.5x2.5x1련,	3.0x2.8x2련 (방류) 3.6x1.8x3련,D2.0x3개(토출)

○ 일반현황

- 위      치 : 영등포구 국회대로 22길 20(양평동 3가 57-3)

- 계획외수위 : E.L 13.42m(수문 계폐수위 : E.L 5.40m)

- 유  수  지 : H.W.L. = E.L 6.0m,   L.W.L. = E.L 3.8m

■ 사업대상지역의 비점오염현황

○ 최근 수질오염 자료(청천시 : ‘15.3.24.～25. 강우시 : ‘15. 4.2.～3.)

- 청천시 :  BOD 평균 109.7mg/L,  최대 149.7mg/L,  최소 51.2mg/L

- 강우시 : BOD 평균 309.8mg/L, 최대 738.0mg/L, 최소 50.3mg/L

■ 사업대상지역의 비점오염원관리 필요성

○ 수질오염총량제 목표수질 달성을 위해 비점오염원 적정관리 필요

- 목표수질(‘20년) : BOD 4.1mg/L, T-P 0.236mg/L(행주대교 지점)

○ 하천 수질개선 및 악취저감을 통해 주변지역 생활환경개선

3. ‘16년도 세부사업 추진계획

■ 전체 사업추진 계획

○ 총 공정계획 : 45%

- 기본 및 실시설계 완료(30%)

- 부지 확보 완료(10%)

- 터파기 완료 등(5%)

전체공정률 100%
기본 및 실시설계(30%)	토지보상 등 부지확보 완료(10%)	착공에서 준공까지(60%)
30%	10%	5%(‘17년 준공예정)

■ 당해연도 세부사업 추진내용

○ 사업내용 : 공정별로 분리하여 작성

- 사 업 명 : 양평1 유수지 CSOs 저류조 비점오염저감시설 설치

- 규    모 : Q=46,000㎥

- 설치위치 : 영등포구 국회대로 22길 20 (양평동 3가 57-3)

- 사업기간 : 2016. 05. ～ 2017. 12. (설계기간 제외)

■ 상반기 예산집행계획 : 2.0%(1/4분기 2.0%)

(단위 : 백만원, %)

구분	합계	분기별 집행계획
		1/4분기		2/4분기	3/4분기	4/4분기
		1월	1/4분기
비점오염저감사업 (국고보조사업)	7,754	-	216	-	3,015	4,523
	(100%)		(2%)		(39%)	(59%)

■  사업별 예산집행 및 교부계획

(단위 : 백만원)

구 분	전년도 예산액 (확보액/집행액)	당해연도 확보․집행					비 고
		확보액	분기별 집행계획
			1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
계	1,476/1,260	7,754	216	-	3,015	4,523
국고보조	0/0	500	-	-	250	250
지방비	1,476/1,260	7,254	216	-	2,765	4,273	(‘16년 이월 액 포함 : 216)
기 금	/

(  )는 교부계획 금액

■ 세부산출내역

사업내용		사업 규모	산출근거	년차별 투자소요(백만원)
				총사 업비	전년도 까지	‘16년	‘17년
양평 1 유수지 CSOs 저류조 설 치 사 업	합 계	용량 46천㎥		36,540	1,260	7,754	27,526
	- 기본 및 실시설계		낙찰금액 적용	1,476	1,260	216	-
	- 책임 감리비		공사비×6.311%	1,915	-	409	1,506
	- 공 사 비(부가세포함)			33,079	-	7,110	25,969
	- 시설부대비		공사비×0.23%	70	-	19	51

※ 「예산안 편성 및 기금운용계획안 작성 세부지침」(기획재정부) 건설부문 요율 적용, 사업규모는 구체적으로 기재(예 흙탕물저감사업, 배수면적 @@ha, 돌림수로 @m, 경사면 보호 @㎡ 등)

4. 유역(지방)환경청 검토의견

■

○

-

-

-

'16년도 양평 유수지 CSOs 저류조 사업(비점오염저감사업) 사업비 집행계획

구분	‘16년 예산 (백만원)	‘16년 이월 (백만원)	예산현액 (백만원)	당해년도 연 간 공 정
				1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
타당성조사
계획수립
기본설계
실시설계		216	216			(216)
공정별 공사	7,538	-	7,538									3,015			4,523
o 식생수로
o 배수로
o 사면보호
o 작물전환
o 기타	7,538	-	7,538									3,015			4,523
공사비합계 (공정률 45%)	7,538	216	7,754			(216)						3,015			4,523
				→ 30%(실시설계 완료) ←			→ 10%(부지확보 등 사업발주) ←			→ 5%(공사 시행, ‘17.12월 준공예정) ←

※ 구분은 해당 시군의 특성에 맞게 변경 가능하고 전체연간공정률을 반드시 기재

(  )는 전년도 이월액