어린이놀이터 준비일정(안)

1.	대상지결정·통보(공원녹지정책과)					∘ 9.7.(월)
2.	1단계 종합보고 및 2단계 대상지 보고					∘ 9.10.(목)
3.	놀이터활동가 및 운영 협의체 구성 및 명단 제출(자치구)					∘ 9.11.(금)
4.	설계비 교부(행정과)					∘ 9.15.(화)
5.	놀이터 추진 관련자 전체워크숍(공원녹지정책과)					∘ 9.18.(금)
			대상 : 공무원, 설계자, 놀이터 활동가 등 주도적 참여 주민
			장소 : 신청사 공용회의실(예정)
			내용 : 놀이터 조성방향, 방법, 디자인, 놀이활동 등 교육
6.	놀이터 조성 의견 수렴을 위한 워크숍(자치구별 4~5회 실시)					∘ 9.21.(월)~10.11.(일)
			대상 : 어린이, 학부모, 교사, 주민 등
			장소 : 놀이터 인근
			내용 : 각 놀이터 맞춤형 커뮤니티 디자인 논의 등
7.	놀이터 설계를 위한 디자인 구상(안) 제출 (자치구)					∘ 10.23.(금)
			제출내용 : 주민 워크숍, 설명회 의견을 반영한 커뮤니티 디자인(안)
			제출방법 : PPT(위치, 워크숍 활동사진, 디자인(안), 조성계획 등)
8.	놀이터 디자인(안) 검토 자문회의(공원녹지정책과)					∘ 10.26.(월)~11.6.(금)
			자문안건 : 2단계 놀이터 조성 방향에 적합한 디자인인지 여부 등 검토 ※ 필요시 놀이터 디자인(안)의 대안 자문단의 개별 자문 예정
9.	놀이터 디자인(안) 시장 최종보고(공원녹지정책과)					∘ 11.13.(금)
			보고내용 : 2단계 놀이터 재조성 디자인(안) 보고
10.	공사비 교부(행정과)					∘ 11.30.(월)
11.	놀이터 설계심의(공원녹지정책과)					∘ ‘16.2월초