업무연락전
지시번호	SMIH-14-18529	연번(문서번호)	SMIH-14-18529
지시일자		작성일자	2014-02-26
지 시 자	남만조	처리기한
제 목	업무지시
내 용
1. 동부간선도로 확장공사(2공구)와 책임감리용역과 관련하여 아래사항에 대하여 업무지시하니 검토후 ‘14. 3. 7일까지 제출하시기 바랍니다. 가. 업무지시 내용 1) 도봉지하차도 5단계 시공에 따른 중랑천 통수단면 확보의 적정성 (기술지원감리원 검토) 2) 도봉지하차도 5단계(하천구간) 방학천 및 중랑천 합류부 통수단면 확보 적정성 및 방학천 수위상승에 따른 대응방안 (기술지원감리원 검토) 3) 도봉지하차도 5단계 시공중 호우(예보) 단계별 수방계획 - 하천내 자재 및 장비 철거계획 포함 4) 도봉지하차도 5단계 수방기간 전 완료를 위한 공기단축 방안. 끝.
붙임 :

행정중심복합도시건설청

서울특별시 도시기반시설본부