시설공사 업무 인계 ․ 인수

【인계․인수 대상 사무 – 보라매공원 시설물정비공사 2건】

Ⅰ	보라매공원 인공암벽등반장 정비공사

□ 공사개요

○ 정비대상 : 인공암벽등반장

○ 정비내용 : 노후 암벽등시설 개․보수

○ 사 업 비 : 300백만원

○ 사업기간 : 2014. 3. ～ 6. 30

□ 추진 현황 – 도면작성 용역 중(추진공정 - 10%)

□ 설계도면작성 용역 개요

○ 용역기간 : 3. 7 ～ 3. 26

○ 용역내용 : 인공암벽장․바닥포장 철거도, 평면도, 측면도, 상세도 작성

○ 용 역 사 : ㈜그룹한 어소시에이트  대표 박명권

○ 용 역 비 :  1,580천원

Ⅱ	보라매공원 시설물 정비공사

□ 공사개요

○ 정비대상 : 테니스장, 북동산․와우산 일원

○ 정비내용 : 테니스장 보수(7면), 북동산․와우산 등산로, 사면정비

○ 사 업 비 : 297백만원

○ 사업기간 : 2014. 3. ～ 6. 30

□ 추진 현황 – 실시설계 중(추진공정 - 5%)

□ 실시설계 용역 개요

○ 용역기간 : 3. 7 ～ 4. 5

○ 용역내용 : 테니스장 재정비, 노후시설정비 등 실시설계, 도면작성

○ 용 역 사 : ㈜그룹한 어소시에이트  대표 박명권

○ 용 역 비 : 12,640천원

1. 보라매공원 인공암벽 등반장 재정비공사 설계도면 작성용역

○ 용역기간 : 2014. 3. 7 ~ 3. 26

○ 용 역 비 : 1,580천원

- 2014년 본예산(300백만원)에 미포함

○ 용역업체 : ㈜그룹한 어소시에이트 대표 박명권

- 책임기술자 : 김도연 실장(#############, 070-4376-1573)

○ 용역내용 : 도면작성(16매) 1식

- 인공암벽 등반장 재정비

○ 추진현황

- 2014. 1. 22 : 사업추진계획 수립

- 2014. 1. 27 : 기술용역 타당성 심사 완료

- 2014. 2.  4 : 설계도면 작성비용 재배정 완료

- 2014. 2. 24 : 실시설계용역 발주

- 2014. 3.  7 : 실시설계용역 계약 및 착수

○ 공 정 율 : 10%

2. 2014년 보라매공원 시설물 재정비공사 실시설계용역

○ 용역기간 : 2014. 3. 7 ~ 4. 5

○ 용 역 비 : 12,640천원

- 2014년 본예산 297백만원에 포함

○ 용역업체 : ㈜그룹한 어소시에이트 대표 박명권

- 책임기술자 : 김도연 실장(#############, 070-4376-1573)

○ 용역내용 : 실시설계용역 1식

- 테니스장 포장 : 인조잔디(5면), 크레이(2면)

- 사면보완 : 북동산(식생토낭) 및 와우산(배수로설치)

- 남문 도로 노선 재정비(담장 이설)

- 청소년수련관 앞 보도블럭 정비 및 조깅트렉 포장 정비

- 배드민턴장 배수로 설치 및 오수처리시설 앞 누수 보수

○ 추진현황

- 2014. 2.  5 : 테니스 이용자 설문조사 결과 보고

- 2014. 2.  7 : 사업추진계획 수립 및 기술용역 타당성 심사 완료

- 2014. 2. 12 : 도로노선 조정계획 협의(장애인자립지원과, 남부장애인복지관)

- 2014. 2. 21 : 실시설계용역 발주

- 2014. 3.  5 : 도로노선 조정 협의 회신(장애인자립지원과)

- 2014. 3.  7 : 실시설계용역 계약 및 착수

○ 공 정 율 : 5%