서울시립과학관 공사관련 협의사항 검토

서울시립과학관 건립공사 추진중 여건 변경 등에 따른 공사 시행부서(도시기반시설본부)의 의견조회 사항에 대한 검토

１	추진배경 및 근거

○ 중앙홀 1~2층 구간 이동 동선 개선에 대한 의견조회

- 도시기반시설본부 건축부-3186(’15.3.20)

○ 1층 강당 전면 화장실 삭제 및 구체적 공간 활용 계획 제시

- 서울시립과학관 전시발주 관련 실무관계자 협의시(’15. 2. 4)의견 제시

２	의견조회 내용

□ 중앙홀 1~2층 구간 이동 동선 개선

당 초	변 경(안)
1층 → 2층 폭2m 계단설치	1층 → 2층 에스컬레이터 추가설치 ①안 : 상하행 Esc설치(1억원) ②안 : 상하행 Esc+계단설치(1.5억원) ※ 구조검토 등을 통해 가능한 안 결정

□ 1층 강당 전면 화장실 삭제에 따른 공간 활용 계획

당 초	변 경(안)
화장실 설치	화장실 삭제
	68.25㎡ (6.5m×10.5m)

３	검토내용

변경내용	검토의견
① 중앙홀 1층 → 2층 에스컬레이터 추가 설치	- 관람객의 편의 등을 위하여 에스컬레이터 추가 설치는 적절함 ※ 추가 소요 예산에 대하여는 총사업비 내 조치예정(예산 부족시 추가확보)
② 1층 강당 전면 화장실 삭제 계획에 따른 구체적 공간 활용 계획 제시요	- 1층 강당 전면 화장실 삭제 계획에 대하여서는 기 통보 한바 있음 ※ 경제정책과-10881(2014.9.8) - 활용 용도에 대하여서는『서울과학관 운영방안 용역』에서 도서실 공간으로 활용토록 제시된 바 있어 이와 유사한 사무실 공간 수준의 마감으로 변경 추진요함