문서번호	정수시설과-376
결재일자	2016.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
협조	행정관리과장
	주무관

여과지 밸브 전원 공급

전기공사 추진 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 2

강북아리수정수센터

(정수시설과)

여과지 밸브 전원공급

전기공사 추진 계획

여과지 1,2계열 유입 및 퇴수밸브 개량과 관련 공압식 수문을   전동식 밸브로 교체함에 따른 여과지 밸브 전원 공급 전기공사를 아래와 같이 추진하고자 함

Ⅰ				사업 개요

□ 사업기간 : ‘16. 2 ~ ’16. 7

□ 사업예산 : 95,000천원

□ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비               및 부대비, 시설비

Ⅱ				사업 추진 계획

□ 밸브 전원 공급 전기공사

○ 분전반 설치분 11면에 대한 전원 공급 1식

- 메인 분전반  1면 (1계열)

- 현장 조작반 10면 (1계열 4면, 2계열 6면)

□ 분전반 구매 설치

○ 분전반 설치  11면

- 메인 분전반  1면 (1계열) ☞ ’15년도 구매 보유자재 활용

- 현장 조작반 10면 (1계열 4면, 2계열 6면) ☞ ’16년도 구매

□ 예산 집행 계획

사 업 명	규 모	소요예산(천원)
- 여과지 밸브전원 공급 전기공사	- 전기공사 1식	49,500
- 여과지 밸브전원 분전반 구매설치	- 현장조작반 10면	44,000
계		93,500

Ⅲ				발주 방법

□ 전기공사 : 전자공개입찰

□ 분전반 구매 설치 : 지명경쟁입찰

○ 지명경쟁입찰 근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조             (제한입찰에 의한 계약과 제한사항 등) 및 동법 제22조(지명입찰             에 의한 계약)에 의거 지명경쟁입찰

○ 지명업체 선정

- “중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제9조 제1항”               에 의한 직접생산 확인 증명서“ 소지 업체로서 지방자치단체를               당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제23조(지명입찰 대상              자의 지명)에 의한 우수업체 5개사 이상을 배전반사업협동조합               에 추천 의뢰하여 선정

○ 지명경쟁입찰 업체 선정 추천 조건

- 직접생산 확인 증명서 소지업체

- 추천업체수 : 5개사 이상

Ⅳ				추진 일정

□ 심사 및 발주 : ’16. 2 ~ ‘16. 2

□ 계약 및 착공 : ’16. 2 ~ ‘16. 3

□ 준        공 : ’16. 7

첨 부 : 설계도서 1부. 끝.