여의2교 보수공사 교통안전시설 개선개요

※ 총 공사기간 : 2014년 8월 20일 ∼ 2014년 12월 17일 (총 120일간)

공사 단계	위치	공사(점용) 기간	공사개요	교통안전시설 변경내역	교통관리계획
1	국회대로 (의원회관앞→ 여의2교남단)	2014.8.20 ∼ 2014.8.31 (12일)	여의2교 보수공사	□보도 및 2개차로 점용 -영등포구청 방면 (4차로→3차로) -서강대교 방면 (6차로→5차로) -점용폭(B=9.55m)	□점용시간 : 00시∼24시 □공사시간 : 22시∼06시 □교통통제수 배치 (공사구간) □의원회관 앞 유턴금지 □교통안내표지, 윙커, 라바콘, 경광등 및 조명등 설치 □원활한 차량동선을 위한 공사 점유면적 최소화
2	국회대로 (의원회관앞→ 여의2교남단)	2014.9.1 ∼ 2014.9.12 (12일)	여의2교 보수공사	□3개차로 점용 -영등포구청 방면 (4차로→3차로) -서강대교 방면 (6차로→4차로) -점용폭(B=10.3m)	□점용시간 : 00시∼24시 □공사시간 : 22시∼06시 □교통통제수 배치 (공사구간) □의원회관 앞 유턴금지 □교통안내표지, 윙커, 라바콘, 경광등 및 조명등 설치 □원활한 차량동선을 위한 공사 점유면적 최소화
3	국회대로 (의원회관앞→ 여의2교남단)	2014.9.13 ∼ 2014.9.24 (12일)	여의2교 보수공사	□3개차로 점용 -영등포구청 방면 (4차로→3차로) -서강대교 방면 (6차로→4차로) -점용폭(B=8.75m)	□점용시간 : 00시∼24시 □공사시간 : 22시∼06시 □교통통제수 배치 (공사구간) □의원회관 앞 유턴금지 □교통안내표지, 윙커, 라바콘, 경광등 및 조명등 설치 □원활한 차량동선을 위한 공사 점유면적 최소화
4	국회대로 (의원회관앞→ 여의2교남단)	2014.9.25 ∼ 2014.10.6 (12일)	여의2교 보수공사	□3개차로 점용 -영등포구청 방면 (4차로→3차로) -서강대교 방면 (6차로→4차로) -점용폭(B=9.15m)	□점용시간 : 00시∼24시 □공사시간 : 22시∼06시 □교통통제수 배치 (공사구간) □의원회관 앞 유턴금지 □교통안내표지, 윙커, 라바콘, 경광등 및 조명등 설치 □원활한 차량동선을 위한 공사 점유면적 최소화

공사 단계	위치	공사(점용) 기간	공사개요	교통안전시설 변경내역	교통관리계획
5	국회대로 (여의2교남단→ 의원회관앞)	2014.10.7 ∼ 2014.10.18 (12일)	여의2교 보수공사	□3개차로 점용 -영등포구청 방면 (4차로→3차로) -서강대교 방면 (6차로→4차로) -점용폭(B=9.15m)	□점용시간 : 00시∼24시 □공사시간 : 22시∼06시 □교통통제수 배치 (공사구간) □의원회관 앞 유턴금지 □교통안내표지, 윙커, 라바콘, 경광등 및 조명등 설치 □원활한 차량동선을 위한 공사 점유면적 최소화
6	국회대로 (여의2교남단→ 의원회관앞)	2014.10.19 ∼ 2014.10.30 (12일)	여의2교 보수공사	□3개차로 점용 -영등포구청 방면 (4차로→3차로) -서강대교 방면 (6차로→4차로) -점용폭(B=9.25m)	□점용시간 : 00시∼24시 □공사시간 : 22시∼06시 □교통통제수 배치 (공사구간) □의원회관 앞 유턴금지 □교통안내표지, 윙커, 라바콘, 경광등 및 조명등 설치 □원활한 차량동선을 위한 공사 점유면적 최소화
7	국회대로 (여의2교남단→ 의원회관앞)	2014.10.31 ∼ 2014.11.11 (12일)	여의2교 보수공사	□3개차로 점용 -영등포구청 방면 (4차로→3차로) -서강대교 방면 (6차로→4차로) -점용폭(B=8.75m)	□점용시간 : 00시∼24시 □공사시간 : 22시∼06시 □교통통제수 배치 (공사구간) □의원회관 앞 유턴금지 □교통안내표지, 윙커, 라바콘, 경광등 및 조명등 설치 □원활한 차량동선을 위한 공사 점유면적 최소화
8	국회대로 (여의2교남단→ 의원회관앞)	2014.11.12 ∼ 2014.11.23 (12일)	여의2교 보수공사	□3개차로 점용 -영등포구청 방면 (4차로→3차로) -서강대교 방면 (6차로→4차로) -점용폭(B=8.75m)	□점용시간 : 00시∼24시 □공사시간 : 22시∼06시 □교통통제수 배치 (공사구간) □의원회관 앞 유턴금지 □교통안내표지, 윙커, 라바콘, 경광등 및 조명등 설치 □원활한 차량동선을 위한 공사 점유면적 최소화

공사 단계	위치	공사(점용) 기간	공사개요	교통안전시설 변경내역	교통관리계획
9	국회대로 (여의2교남단→ 의원회관앞)	2014.11.24 ∼ 2014.12.5 (12일)	여의2교 보수공사	□3개차로 점용 -영등포구청 방면 (4차로→3차로) -서강대교 방면 (6차로→4차로) -점용폭(B=10.3m)	□점용시간 : 00시∼24시 □공사시간 : 22시∼06시 □교통통제수 배치 (공사구간) □의원회관 앞 유턴금지 □교통안내표지, 윙커, 라바콘, 경광등 및 조명등 설치 □원활한 차량동선을 위한 공사 점유면적 최소화
10	국회대로 (여의2교남단→ 의원회관앞)	2014.12.6 ∼ 2014.12.17 (12일)	여의2교 보수공사	□보도 및 2개차로 점용 -영등포구청 방면 (4차로→3차로) -서강대교 방면 (6차로→5차로) -점용폭(B=9.55m)	□점용시간 : 00시∼24시 □공사시간 : 22시∼06시 □교통통제수 배치 (공사구간) □의원회관 앞 유턴금지 □교통안내표지, 윙커, 라바콘, 경광등 및 조명등 설치 □원활한 차량동선을 위한 공사 점유면적 최소화