공 사 기 간  연 기 사 유 서

1. 공사기간 연기사유

1) 도로점용(굴착, 복구)허가 지연

- 공사중지기간 : 2014년 7월 1일 ~ 8월31일

* 도로점용(굴착.복구)허가일 : 2014년 9월 1일

2. 공사기간 연기 일수 산정

1) 도로굴착허가지연으로 인한 작업중지 기간

- 2014년 7월 1일 ~ 8월31일 : 62일

3. 연기 요청일 : 상기 산정일수 중 실소요기간 반영 31일 신청.

4 .공사 기간 : 당초 2014년 04월 14일 ~ 2014년 10월 10일

변경 2014년 04월 14일 ~ 2014년 11월 10일 (증31일)

2014년 09월 25일

첨부 : 1. 도로점용 허가서 1부.

주    소 : 서울시 강서구 내발산동678-4

회 사 명 : 고천건설(주)

대표이사 : 윤영선    (인)