문서번호	안전총괄과-11820
결재일자	2019.8.20.
공개여부	비공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	안전정책팀장	안전총괄과장		안전총괄관
협 조

기반시설 빅데이터 시스템 개발 용역 설계변경 시행 보고

2019. 8.

안전총괄실

(안전총괄과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

기반시설 빅데이터 시스템개발 용역 설계변경 시행 보고

’18.12월 목동 열수송관 파열사고 계기로 지하시설물 열수송관에 대한 빅데이터 분석시스템 개발 추가 시행에 따른 설계변경 사항을 보고 드림.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 기반시설 빅데이터 분석시스템 개발 및 실태평가 총괄 용역

○ 계약금액 : 1,005,701,000원

○ 계약기간 : ’18. 9. 4. ~ ’19. 9. 4.

○ 계 약 자 : 이에스이주식회사 대표 박경식외 4

□ 추진경위

○ ’18.12.11. : 목동 열수송관 파열사고 발생

○ ’18.12.29. : 지하시설물 안전관리 추진계획 수립(시장 방침 제240호)

- 열수송관 포함, 빅데이터 분석․실태평가를 통한 노후인프라 장수명화 등 선제적 유지관리 추진

○ ’19.05.10. : 열수송관 선제적 유지관리 추진계획 수립

- 실태평가 (서울에너지공사), 빅데이터시스템 개발 (안전총괄과) 추진

○ ’19.06.13. : 정보화사업 예산타당성 심사 결과 통보

○ ’19.08.12. : 지하시설물 통합안전관리 대책 수립(시장 방침 제173호)

□ 설계변경 보고내용

○ 변경 내용 및 사유 : 열수송관 추가 빅데이터 분석시스템 구축에 따른 계약금액 및 기간 연장

- 계약기간 : (당초)’18.9.4.∼’19.9.4. ⇒ (변경)’18.9.4.∼’19.12.31.

- 계약금액

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비고
계약금액	1,005,701,000	1,145,340,100	증)139,639,100

□ 조치계획

○ 상기와 같이 열수송관 추가 설계변경(계약금액 및 준공기한 연기)하여 기반시설 빅데이터 분석시스템 구축에 차질이 없도록 조치코자 함.

붙  임 : 1) 변경 설계서 1 부.

2) 준공기한 연기의뢰서 1 부.

3) 정보화사업 예산타당성 심사결과 1 부.

4) 합의각서 1 부.   끝.