<별지 제82호서식>

준공(납품)기한 연기의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명 : 서울대공원 대동물관 동물사 및 방사장 안전시설 설치공사

나. 계약업체 : ㈜주원공영 대표 김 형  균

다. 계약금액 : 일금삼억팔천이십오만오천구십칠원(￦380,255,097)

라. 계약년월일 : 2014. 12. 04.

마. 착공년월일 : 2014. 12. 05.

바. 준공기한 :   2015. 02. 02.

2. 위 공사의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : ‘15. 02. 16.

나. 연기사유 귀책소재 : -

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

○ 동물복지과에서 추가 공사 요청으로 인하여 절대공기 부족으로 준공기한을 연기하는 것이 타당할 것으로 판단됨

2015년    2월     일

서울대공원 시설과장 공 헌 구 (인)

서울대공원(분임)경리관 귀하