<별지 제82호서식>

준공(납품)기한 연기의뢰서

1. 계약내용

가. 계약건명 : 서울대공원 백두산호랑이숲 조성사업 전기시설 개선공사

나. 계약업체 : ㈜제이케이넷 대표 이중구

다. 계약금액 : 일금 일억일백일십오만육천칠백구십원정(￦101,156,790)

라. 계약년월일 : 2013. 05. 06.

마. 착공년월일 : 2013. 05. 06.

바. 준공기한 :   2014. 02. 28.

2. 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 연기기한 : ‘14. 5. 30.

나. 연기사유 귀책소재 : -

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

라. 연기사유

○ 본 공사는 전책, 공원등 및 케이블 개량 등을 시행하는 공사로 방사장 및 수경설비, 관람로 등이 선행되어야 가능한 후속 공정인 바, 조경분야 공사가 사고이월로 인해 `14. 2월말까지 공사 완료가 곤란할 것으로 판단되며

○ 특히 겨울철 공사(강추위, 적설 등) 중지, AI로 인해 절대공기 부족으로 추가적인 공사기간 확보가 필요할 것으로 사료되며

○ 개원 30주년 행사가 `14. 5월 예정임을 감안하여 공사기간을 연기코자 함

2014년    2월     일

서울대공원 시설과장 공 헌 구 (인)

서울대공원(분임)경리관 귀하