사가정~암사 광역도로사업 연이월 요청서

□ 사가정~암사 광역도로 사업개요

구 분	내 용
사업기간	2001 ~ 2016
총사업비	4,116억원
사업규모	o 위치 : 서울시 강동구 암사동 ～ 경기도 구리시 아천동 o 규모 : 도로개설 총연장 2.7km, B=24m∼44m(4∼6차로)
지원조건	o Matching Fund(총사업비의 50% 국고보조금 지원)
사업시행주체	서울특별시

□ 요청경위

ㅇ 구리시 구간(아천IC) 공사시행과 관련하여 구리시 부여 사업 인가조건 이행(구리시 대체녹지 조성 및 3-26호 도로개설)이 지연됨에 따라 연이월 필요

- 중로 3-26호선 접속도로 : B=12m, L=200m

- 대체녹지 조성 : 구리시 사노동 A=89,206㎡

□ 향후계획

ㅇ 인가조건 사업 완료를 위해 연이월 처리 후 금년 하반기 사업비
정산 및 완료보고 예정

고양화전-신사 광역도로사업 연이월 요청서

□ 고양화전-신사 광역도로 사업개요

구 분	내 용
사업기간	2005 ~ 2017
총사업비	1,710억원
사업규모	o 위치 : 경기도 고양시 덕양구 도내동 ∼ 서울시 은평구 신사동 o 규모 : L=5.0㎞(서울시 1.0km, 고양시 4.0km), B=26.5m(4차로) 신설
지원조건	o Matching Fund(총사업비의 50% 국고보조금 지원)
사업시행주체	서울특별시

□ 요청경위

ㅇ 서울시 구간은 ’16년 9월 공사 준공하였으나, 고양시 구간 공사가 ‘17년 12월 준공됨에 따라 최종 사업비 정산 미시행으로 인해 연이월 필요

□ 향후계획

ㅇ 연이월 처리 후 금년 상반기 사업비 정산 및 완료보고 예정