서울특별시공고 제2016-963호

도시계획시설(도로)사업 실시계획 변경인가를 위한 열람공고

1. 서울특별시고시 제2009-151호(2009.4.9.)로 도시계획시설(도로)결정, 은평구고시 제2012-68호(2012.11.15.)로 도시관리계획(용도지구:미관지구, 도시계획시설:도로․학교)변경 결정 및 지형도면 고시, 서울특별시공고 제2013-80호(2013.01.24.)로 도시계획시설(도로)사업 실시계획을 위한 열람 공고, 서울특별시고시 제2013-49호(2013.02.21.)로 도시계획시설(도로)사업 실시계획 고시, 서울특별시고시 제2016-11호(′16. 1.14.) 및 서울특별시고시 제2016-67호(′16. 3.17.) 로 도시계획시설(도로)사업 실시계획 변경 고시된 『신사사거리~고양시계간 도로개설공사』에 대하여 도로용지 추가편입으로 토지조서 등 변경사항이 발생되어 도시계획시설(도로)사업 실시계획 변경인가(경미한 도시관리계획 변경결정 포함)를 위하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제88조 및 같은법 시행령 제97조에 의거 실시계획변경 작성하고, 같은법 제90조 및 같은법 시행령 제99조 규정에 의거 관계 서류를 다음과 같이 열람공고 합니다.

2. 본 열람공고 내용에 대하여 의견이 있으신 분은 열람기간 내에 의견서를 열람 장소에 서면으로 제출하시기 바라며, 토지조서 변경사항 해당 토지 소유자와 이해관계인에게는 개별통지 할 것이나 송달 불능 등 미수령자에 대하여는 본 열람공고로 갈음합니다.

2016년 5월 4일                    서 울 특 별 시 장

가. 사업시행지의 위치 : 은평구 신사동 산 48-2~ 산39-11, 산31-4(도로편입 변경)

나. 사업의 종류 및 명칭 (변경없음)

1) 종  류 : 도시계획시설(도로)사업

2) 명  칭 : 신사사거리~고양시계간 도로개설공사

다. 사업의 규모 : 폭 4차로,  연장 366m (변경없음)

라. 사업시행자의 성명 및 주소 (변경없음)

1) 성 명 : 서울특별시장(서울특별시 도시기반시설본부장)

2) 주 소 : 서울시 중구 세종대로 110

마. 사업의 착수예정일 및 준공예정일

1) 당 초 : 실시계획고시일로부터 2016년05월26일까지

2) 변 경 : 실시계획고시일로부터 2017년03월30일까지

- 변경사유 : 1필지 도로용지 추가편입으로 토지보상 및 조성공사를 위한 사업기간 연장 필요

바. 열람기간 : 공고일로부터 14일간

사. 열람장소 : 서울특별시 도시기반시설본부 토목부(☎ 02-3708-2577)

아. 수용 또는 사용할 토지 또는 물건의 소재지․ 지번․ 지목 및 면적, 소유권과 소유권 외의 권리 명세 및 그 소유자 ․ 권리자의 성명 ․ 주소 : 붙임 (토지조서 변경)

자. 기타 자세한 사항은 서울특별시 도시기반시설본부 토목부(☎02-3708-2577)로 문의하시기 바랍니다.

<붙임>

토   지   조   서 (변경)

□ 사업명 : 신사사거리~고양시계간 도로개설공사

연번	변경구분	동명	지번	지목	편입 면적 (㎡)	소 유 자		지분	이 해 관 계 인			비고
						성 명	주 소		성 명	주 소	관리관계
1~ 11	변경없음
12	당초	-	-	-	-	-
	변경	신사동	산31-4	임	155	박재형	서울시 종로구 창경궁로35길 42-1 (혜화동)					도로편입

지  장  물  조  서

□ 사업명 : 신사사거리~고양시계간 도로개설공사

일련 번호	변경 구분	소 재 지			구분	지 번	물건의 종류	구조 및 규격	수 량 (㎡)	소 유 자		관 계 인			비 고
		군(구)	면(읍)	리(동)						성 명	주 소	성 명	주 소	권리관계
1~4	변경 없음