서울지하철 9호선 연장건설(2,3단계) 정보통신설비 구매‧설치 사업

1단계 행선안내설비

2단계SW설치계획서

2014. 05. 29

	서울지하철 9호선 연장건설(2,3단계) 정보통신설비 물품 구매설치	문서번호
		개정일자	2014. 05. 26
	SW설치계획서	개정번호	1.00

목   차

1. 개요	2

2. 구성도	3

2.1 (현재) 1단계 운영 및 2단계 시험을 위한 구성	3

2.2 (변경) 2단계 S/W적용완료까지 1단계와 2단계 병렬운전을 위한 구성	3

3. 설치계획	4

3.1 2단계용 HSE 소프트웨어 설치	4

3.2 2단계용 역사 소프트웨어 업그레이드 진행	4

3.3 HSE 서버 운영전환 및 1단계 HSE Controller 철거작업	5

3.4 2단계 행선안내 프로그램 운영교육	5

4. 예정공정표	6

5. 안전관리 및 환경관리 계획	9

6. 출입자 명단	11

1. 개요

구 분	주 요 내 용	비 고
사업명	서울지하철9호선 연장건설(2,3단계) 정보통신설비 구축
2. 공정명	1단계 행선안내설비의 2단계 소프트웨어 설치 작업
3. 위치	관제실/통신기계실, 920~925 정거장/안전관리실
4. 목적	서울지하철 9호선 연장건설(2~3단계) 정보통신설비(행선안내 설비)의 기존 1단계에서 운영중인 행선안내 설비에 대한 2단계 소프트웨어 업그레이드 적용계획임.
5. 주요공종	1. 2단계용 HSE 소프트웨어 적용 2. 2단계용 LSE 및 게시기 소프트웨어 적용 LSE 및 게시기 소프트웨어 업그레이드 및 확인 3. 1단계용 HSE Controller 장비철거 4. 2단계용 프로그램 운영자 교육
6. 작업기간	2014. 06. 09 ~ 2014. 06. 27
7. 주요자재목록	- HSE 컨트롤러 1개 - 임시설치용 HSE P/C 2개 - 시험용 노트북 1개

2. 구성도

2.1 (시범적용기간) 1단계 운영 및 2단계 시범적용을 위한 구성

2.2 (1,2단계 병행운영기간) 2단계 S/W적용완료까지 1,2단계 S/W 병렬운전을 위한 구성

※ 2단계 S/W적용완료 전까지, 2단계용 주/예비 HSE PC를 임시로 설치하여 운영함.
(임시 HSE PC는 S/W적용완료후 회수함.)

구 분	적용 내역	비 고
HSE	2단계의 주/예비 HSE PC를 임시로 설치하여 운영함. 2단계용 HSE컨트롤러에서 CCTV/VTS설비로 TTC데이터를 전송함. 2단계 S/W에서 전기시계 데이터를 수신함.	임시HSE PC2대 (주, 예비)
LSE	2단계 S/W로 절체되는 역사는 2단계 S/W가 모든 기능을 수행함. 1단계 S/W는 사용하지 않음. (단, 삭제는 하지않음) ※ 시범운영기간에 적용되었던 “1단계/2단계간 절체기능”은 사용하지 않음.

2.3 (2단계 적용완료) 2단계 S/W적용완료 후, 2단계 S/W단독운전을 위한 구성

※ 임시로 설치된 주/예비 HSE PC와 1단계 HSE컨트롤러를 철거함.

구 분	적용 내역	비 고
HSE	2단계의 주/예비용 임시HSE PC를 철거하고, 기존 HSE PC에 2단계 S/W를 설치하여 운영함. 케이블 배선 정리. ※ 최종작업 전, 1단계 HSE 주/예비 PC의 OS초기화는 운영사에서 결정하여 수행함.
LSE	변화없음.

3. 설치계획

3.1 2단계용 HSE 소프트웨어 설치

1) 작업일시 : 6/9(월) 야간 예정

2) 작업장소 : 본사 통신기계실내 HSE Rack

3) 작업예정사항

① 2단계용 임시 HSE 주/예비 P/C 설치

: HSE Rack주변에 2단계용 HSE 주/예비 P/C 설치

② 신규 HSE 컨트롤러 및 2단계 HSE 주/예비 PC의 Network 배선 및 설정

: 신규 HSE 컨트롤러에서 HUB로 LAN 케이블 연결 및 네트워크 설정

: 2단계 HSE 주/예비 PC에서 HUB로 LAN 케이블 연결 및 네트워크 설정

③ 주변장치 인터페이스를 위한 결선 및 확인

: 전기시계설비를 2단계 S/W에서 수신하도록 결선 및 설정

: CCTV와 VTS용 RS422통신을 2단계 HSE 컨트롤러로 배선 및 결선

④ 2단계 HSE 소프트웨어 설치 및 시스템 설정

: 소프트웨어 복사 및 환경설정

3.2 2단계용 역사 소프트웨어 업그레이드 진행

1) 작업일시 : 6/10(화)~6/27(금) 예정

2) 작업장소 : 본사 통신기계실내 HSE ,

전 역사(901~925)의 안전관리실 LSE 및 각 게시기

3) 작업예정사항

① 적용역사 LSE내 LSE 프로그램 설치 및 2단계 HSE 소프트웨어와의 접속설정

② 적용역사의 각 게시기에 프로그램 설치 및 LSE와의 접속설정

③ LSE/게시기/출입구 제어기 프로그램 동작확인 및 화면표출 확인

4) 요청사항

① 적용역사 출입허가

3.3 HSE 서버 운영전환 및 1단계 HSE Controller 철거작업

1) 작업일시 : 6/26(목) 야간 예정

2) 작업장소 : 본사 통신기계실내 HSE Rack

3) 작업예정사항

① 임시 HSE에서 1단계 HSE로 프로그램 이전설치

② 임시 HSE 철거 및 1단계 병행운전용 TTC 케이블 철거

③ 1단계용 HSE Controller 철거 및 배선정리

④ HSE 랙정리 및 역사별 통신상태 확인

4) 요청사항

① 관제실 통신기계실 출입허가

② 1단계 HSE(주, 예비)에 2단계 SW 설치를 위한 하드웨어 초기화 및 OS 세팅

③ 1단계 장비 철거 허가

3.4 2단계 행선안내 프로그램 운영교육

1) 작업일시 : 6/18~27 내에서 일정협의

2) 작업장소 : 본사 통신기계실내 HSE Rack

3) 작업예정사항

① 2단계 시스템 소개 및 장비 설명

② 2단계 OP/HSE/LSE 운영프로그램 운영방법 교육

4) 요청사항

① 교육장소 및 일정 협의

4. 예정공정표

일정	작업내용	작업시간	작업위치	작업인원	항목	세부 작업	설치장소	비고
6/09	2단계용 HSE 소프트웨어 설치	6/9 22:00 ~ 01:30 (야간)	종합관제 통신기계실	4명	HSE 임시운영서버 설치	임시운영서버(주,예비) H/W 및 S/W 설치	통신기계실 행선안내 RACK	HSE관련 야간작업시 DIA변경이 없는지 확인이 필요함.
					임시 노트북 (1EA)
	케이블 연결	6/10 01:30 ~ 04:30 (야간)	종합관제 통신기계실	4명	외부설비 연결용(CCTV, VTS, 전기시계) 케이블 설치	임시운영서버 케이블 연결
6/10	정거장 LSE/게시기 프로그램 설치	15:00 ~ 07:00 (주간/야간)	마곡나루역 양천향교역	3명	LSE 프로그램 설치	LSE에 신규 소프트웨어 설치	LSE	초기 7개역사작업시, 막차 및 첫차운행시간에 게시기 동작 확인
					승강장 게시기 프로그램설치	승강장 TDI에 신규 소프트웨어 설치	승강장TDI
					출입구 게시기 프로그램 설치	출입구 TDI에 신규 소프트웨어 설치	출입구TDI(1/8개소)
					통신 및 표출확인	스케쥴/궤도정보 및 게시기표출 확인	HSE/LSE
6/11	정거장 LSE/게시기 프로그램 설치	15:00 ~ 07:00 (주간/야간)	공항시장역 신방화역	3명	LSE 프로그램 설치	LSE에 신규 소프트웨어 설치	LSE
					승강장 게시기 프로그램설치	승강장 TDI에 신규 소프트웨어 설치	승강장TDI
					출입구 게시기 프로그램 설치	출입구 TDI에 신규 소프트웨어 설치	출입구TDI(4/8개소)
					통신 및 표출확인	스케쥴/궤도정보 및 게시기표출 확인	HSE/LSE
6/12	정거장 LSE/게시기 프로그램 설치	15:00 ~ 07:00 (주간/야간)	가양역 증미역 등촌역	3명	LSE 프로그램 설치	LSE에 신규 소프트웨어 설치	LSE
					승강장 게시기 프로그램설치	승강장 TDI에 신규 소프트웨어 설치	승강장TDI
					출입구 게시기 프로그램 설치	출입구 TDI에 신규 소프트웨어 설치	출입구TDI(10/4/8)
					통신 및 표출확인	스케쥴/궤도정보 및 게시기표출 확인	HSE/LSE
6/16	정거장 LSE/게시기 프로그램 설치	10:00 ~ 19:00 (주간)	염창역 신목동역 선유도역	3명	LSE 프로그램 설치	LSE에 신규 소프트웨어 설치	LSE
					승강장 게시기 프로그램설치	승강장 TDI에 신규 소프트웨어 설치	승강장TDI
					출입구 게시기 프로그램 설치	출입구 TDI에 신규 소프트웨어 설치	출입구TDI(4/3/8)
					통신 및 표출확인	스케쥴/궤도정보 및 게시기표출 확인	HSE/LSE
6/17	정거장 LSE/게시기 프로그램 설치	10:00 ~ 19:00 (주간)	당산역 국회의사당 여의도역	3명	LSE 프로그램 설치	LSE에 신규 소프트웨어 설치	LSE
					승강장 게시기 프로그램설치	승강장 TDI에 신규 소프트웨어 설치	승강장TDI
					출입구 게시기 프로그램 설치	출입구 TDI에 신규 소프트웨어 설치	출입구TDI(7/6/6)
					통신 및 표출확인	스케쥴/궤도정보 및 게시기표출 확인	HSE/LSE
6/18	정거장 LSE/게시기 프로그램 설치	10:00 ~ 19:00 (주간)	샛강역 노량진역 노들역	3명	LSE 프로그램 설치	LSE에 신규 소프트웨어 설치	LSE
					승강장 게시기 프로그램설치	승강장 TDI에 신규 소프트웨어 설치	승강장TDI
					출입구 게시기 프로그램 설치	출입구 TDI에 신규 소프트웨어 설치	출입구TDI(4/6/5)
					통신 및 표출확인	스케쥴/궤도정보 및 게시기표출 확인	HSE/LSE
6/19	정거장 LSE/게시기 프로그램 설치	10:00 ~ 19:00 (주간)	흑석역 동작역 구반포역	3명	LSE 프로그램 설치	LSE에 신규 소프트웨어 설치	LSE
					승강장 게시기 프로그램설치	승강장 TDI에 신규 소프트웨어 설치	승강장TDI
					출입구 게시기 프로그램 설치	출입구 TDI에 신규 소프트웨어 설치	출입구TDI(4/5/3)
					통신 및 표출확인	스케쥴/궤도정보 및 게시기표출 확인	HSE/LSE
6/20	정거장 LSE/게시기 프로그램 설치	10:00 ~ 19:00 (주간)		3명	910~921역사 점검 및 보완
6/23	정거장 LSE/게시기 프로그램 설치	10:00 ~ 19:00 (주간)	신반포역 고속터미널	3명	LSE 프로그램 설치	LSE에 신규 소프트웨어 설치	LSE
					승강장 게시기 프로그램설치	승강장 TDI에 신규 소프트웨어 설치	승강장TDI
					출입구 게시기 프로그램 설치	출입구 TDI에 신규 소프트웨어 설치	출입구TDI(4/3개소)
					통신 및 표출확인	스케쥴/궤도정보 및 게시기표출 확인	HSE/LSE
6/24	정거장 LSE/게시기 프로그램 설치	10:00 ~ 19:00 (주간)	사평 신논현	3명	LSE 프로그램 설치	LSE에 신규 소프트웨어 설치	LSE
					승강장 게시기 프로그램설치	승강장 TDI에 신규 소프트웨어 설치	승강장TDI
					출입구 게시기 프로그램 설치	출입구 TDI에 신규 소프트웨어 설치	출입구TDI(2/7개소)
					통신 및 표출확인	스케쥴/궤도정보 및 게시기표출 확인	HSE/LSE
6/25	정거장 LSE/게시기 프로그램 설치	10:00 ~ 19:00 (주간)	개화 김포공항	3명	LSE 프로그램 설치	LSE에 신규 소프트웨어 설치	LSE
					승강장 게시기 프로그램설치	승강장 TDI에 신규 소프트웨어 설치	승강장TDI
					출입구 게시기 프로그램 설치	출입구 TDI에 신규 소프트웨어 설치	출입구TDI(3개소)
					통신 및 표출확인	스케쥴/궤도정보 및 게시기표출 확인	HSE/LSE
6/26	정거장 LSE/게시기 프로그램 설치	10:00 ~ 19:00 (주간)		3명	901~925역사 점검 및 보완
6/27	1단계 장비 철거	01:30 ~ 04:30 (야간)	종합관제 통신기계실	4명	HSE SW 전환작업 HSE 임시운영서버 철거 기존 HSE 콘트롤러 (1EA) 철거	임시 HSE PC에서 1단계 HSE로 SW 이전설치 및 서버전환작업. 기존 1단계 장비 철거 및 케이블 배선 정리	통신기계실 행선안내 RACK
	정거장 LSE/게시기 프로그램 설치	~ 10:00 (주간)		3명	901~925역사 점검 및 보완

※ HSE Controller 장비 철거 및 배선정리작업은 운영사 관리하에 야간작업으로 진행합니다.

※ 2단계 S/W적용 후, 게시기 동작이상 및 민원 발생에 즉시 대처한다.

5. 안전관리 및 환경관리 계획

5.1 안전관리 계획

(1) 합동안전관리

1단계 행선안내설비 작업원으로 인하여 1단계 영업운전에 지장을 주는 사항발생시 모든 민,형사상의 책임과 영업손실(이행 과징금등) 일체 배상을 책임진다.

(2) 관리감독

담당감리원 및 현장공사 관계자 입회하여 안전대책에 최선을 다한다.

(3) 안전점검구분

안전점검관리자 구분

총괄 책임자 : 현장대리인

공사관리 및 안전관리자 : 담당관리자

작업장별 관리자 : 현장투입 직원(관리감독자)

5.2 안전교육

(1) 작업 전 각 호의 안전교육 실시

1) 당일작업내용

2) 위험용인 및 방지대책

3) 참여기술자 및 작업자 개인별 임무 숙지

4) 안전사고 발생시 응급조치 요령

(2) 안전보호구 착용

1) 안전모, 안전화, 보안경등 개인보호구를 반드시 착용

(3) 사전점검

1) 전기용품 사용시 접지를 하여 작업원의 감전사고 예방

2) 작업원 적합성 점검(신체이상유무, 음주여부)

5.3 환경관리 계획

1) 작업 전, 주변 정리정돈 및 작업후 작업 폐기물을 수거후 분리 배출

2) 출입구작업시 통로를 열차이용객의 확보한 후 작업한다.

5-4 사고보고 계통도

6. 출입자 명단

□ 공사명 : 서울지하철9호선 연장건설 통신설비 구축

번호	이름	소속	핸드폰	비고
1	강종진	현대정보기술	#############
2	정재훈	㈜아트웨어	#############
3	윤수아	㈜아트웨어	#############
4
5