양평유수지 내 작업장 점용 검토

2016. 01.

도시기반시설본부

(방재시설부)

양평유수지 내 공기정화시설(#2) 작업장 점용 검토

서울제물포터널 공사와 관련하여 양평유수지 공기정화시설(#2) 작업장 점용에 대한 검토 임.

□ 양평유수지 점용계획

○ 위    치 : 영등포구 양평동 양평유수지 내 유휴부지

○ 점용면적 : 공기정화시설 161.6㎡(작업장 4,148㎡)

- 작업장 일시 점용기간 : 2015. ~ 2020.10.15

□ 공기정화시설(#2) 위치선정 검토

○ 검토1안 : 안양천 제방내 설치(국토부 협의 ′13.5.21, ′13.8.20)

- 제체 접속부 세굴, 침식, 누수 등 안정성 문제로 불가 협의

- 서부간선도로와 간섭으로 작업장 확보 곤란

○ 검토2안 : 안양천 제외지 설치(국토부 협의 ′13.5.21, ′13.8.20)

- 통수단면 감소, 유수흐름 방해, 부유물에 의한 구조물 손상, 기존 체육 시설(자전거 도로 등) 이용불편 등으로 불가 협의

○ 대안검토 : 안양천내 설치 불가로 인접지인 양평유수지 내 설치

- 유수지내 고지대(집수면 보다 2m 높음) 설치로 유수흐름에 영향이 적음[수위상승 0.8cm]

- 토지활용, 경관 등을 고려할 때 양평유수지가 최적으로 검토됨.

※ 공기정화시설(#2) 위치가 목동IC로 인해 일반인의 접근이 불가하여 수목으로 차폐시 노출이 최소화 됨.

□ 작업장 점용 검토

○ 작업장 DECK를 서부간선도로 높이로 조정하여 공사차량 진․출입로를 서부간선도로에 직접 연결하여 유수지 점용 최소화

○ 도수로 저촉 없이 DECK를 설치하여 유수지 영향 최소화

□ 선유고가 철거시기 검토

○ 선유고가 교차로의 서비스 수준이 제물포터널 개통으로 “E⇾D” 수준으로 개선(2028년 기준)

- 터널개통 전 14만8천대 ⇾ 개통 후 11만9천대(2만9천대 감소)

○ 선유고가 철거는 터널개통 후 지상교통량 일부(2만9천대)가 터널로 전환되어야 가능한 것으로 예측됨.

- 현재 교차로 서비스수준 E(94.1초/대)

- 터널 개통전 고가철거시 서비스수준 F(168.5초/대) <최적화시 F(122.1초/대)>

- 터널 개통후 고가철거시 서비스수준 D(53.6초/대) <최적화시 D(50.1초/대)>

□ 종합 검토결과(본부 요청사항)

○ 터널개통 전 선유고가 철거는 현재보다 교통체증을 유발하는 것으로 예측되어, 터널개통 후 철거하는 것이 타당하다고 판단됨

○ ′15.10.16일 착공된 제물포터널의 정상적인 공사 진행을 위해서는 양평유수지내 공사가 조속히 시작되어야 함.

○ 제물포터널의 계획된 기간 내 공사 준공(′20.10.15일)을 위해서 구청장님의 협조를 부탁드림.

○ 영등포구의 숙원사업인 선유고가 철거, 국회대로 및 서부간선도로 친환경사업, 양평유수지 CSOs 등은 계획대로 추진토록 하겠음.

양평유수지 점용관련 참고자료

2016. 01.

도시기반시설본부

(방재시설부)

선유고가차도 철거시 교차로 교통분석 결과

현황분석

❍ 선유고가 교차로의 첨두시 교통소통 서비스수준 "E"로서 일부 지체가 발생하고 있음

	2013년 6월 첨두시 방향별 교통량(대/시)
	( ) : 고가교통량
	지체도	서비스수준
	94.1초/대	E

교통량 예측(2028년 기준)

❍ 장래 사업완료시, 동‧서방향(국회대로)의 교통량은 19~27% 감소가 예상되나, 남‧북방향(선유로)은 큰 변화가 없을 것으로 예측됨.

구 분	동·서방향		남·북방향		장래(2028년)
	인천방향	여의도방향	양화대교방향	문래동방향
사업 미시행시	147,886	94,439	108,005	44,362
사업 시행시	119,764	68,262	103,331	44,296
증·감	-28,122 (-19.0%)	-26,177 (-27.7%)	-4,674 (-4.35%)	-66 (-0.15%)
주변 간선도로 교통량 감소량	올림픽대로	노들길	영등포로	경인로
	-6,574	-5,507	-3,167	-1,706

교차로 교통여건 분석

고가 존치시

❍ 제물포터널 개통에 따른 교통량 감소로 교차로 서비스수준 “D”로 개선되는 것으로 분석됨 (신호주기 150초 운영)

구 분	현시1	현시2	현시3	현시4	지체도
신호운영	← →	↓↑	↓□	-	53.6/D
신호주기	80(3)	34(3)	27(3)	-	150초

고가 철거시

❍ 기존 고가를 이용하여 무신호로 처리되던 인천 → 양화대교 방면 좌회전 현시 추가로 교차로 서비스 수준이 “F” 이하로 악화되는 것으로 분석됨

구 분	현시1	현시2	현시3	현시4	지체도
신호운영	← →	□ →	↓↑	↓□	126.8/F
신호주기	46(3)	57(3)	31(3)	24(3)	170초

고가 철거 및 교차로 운영 최적화시

❍ 교차로 운영 최적화 계획(안)

- 고가차도 구조물 점유 공간을 활용하여 주교통 방향 차로수 추가 확보

▸ 인천 → 양화대교 방면 : 좌회전 1개차로 추가 (2개차로→3개차로)

▸ 양화대교 → 여의도 방면 : 좌회전 1개차로 추가 (1개차로→2개차로)

❍ 교통여건 분석

- 주 교통방향 도로용량 추가로 고가차도 존치시 보다 지체도가 다소 개선되는 것으로 분석됨

구 분	현시1	현시2	현시3	현시4	지체도
신호운영	← →	□ →	↓↑	↓□	50.1/D
신호주기	43(3)	46(3)	32(3)	14(3)	150초

영등포구 관련 시책사업 추진계획

1		선유고가차도 철거

□ 선유고가차도 시설개요

○ 시 설 명 : 선유고가차도 (준공년도 : 1991.12. 1.)

○ 위    치 : 목동교 교차로 ~ 영등포구청 별관, 현대3차아파트

○ 규    모 : 여의도 방면(2차로), 양화대교 방면(2차로)

○ 상태등급 : B등급 (2014년 기준)

□ 추진현황 및 향후계획

○ 2015.06 ~ 2016.04 : 고가차도 철거․재활용에 따른 교통운영개선방안 수립 및 관리 기본계획 용역

○ 2020.01 ~ 2020.12 : 고가차도 철거 기본 및 실시설계 용역 시행(예정)

○ 2021.01 ~ 2021.12 : 공사시행(예정)

2		국회대로 지하차도 및 상부 공원화 사업

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 국회대로 지하차도 및 상부 공원화 사업

○ 사업구간 : 신원IC ~ 영등포구 국회의사당 교차로

○ 규    모 : 폭 40~55m, 연장 7.6km, 상부공원조성(110,000㎡)

- 영등포구간 : 도로다이어트 폭 3m, 연장 3km, 친환경 공간 24,000㎡

○ 사 업 비 : 2,696억원(공사비 2,493억원, 부대비 203억원)

○ 공사기간 : 3년【제물포터널 개통 후 착수(2020년 예정)】

□ 추진현황 및 향후계획

○ 2015. 2.28.           : 타당성조사 및 기본계획용역

○ 2015.12.05.          : 조달발주 의뢰

○ 2016.06 ~ 2019.12 : 1단계 구간 공사시행

○ 2020.01 ~ 2023.12 : 2단계구간 기본 및 실시설계, 공사시행(예정)

3		서부간선도로 친환경 공간 조성

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성

○ 사업구간 : 영등포구 양평동 목동교 ~ 금천구 독선동 금천교

○ 규    모 : 폭 15m, 연장8.1km, 친환경 공간 조성(179,790㎡)

- 도로다이어트 및 이면도로 활용한 녹지시설(164,205㎡)

- 그린웨이 및 보행녹도(15,585㎡)

○ 사 업 비 : 916억원(공사비 830억원, 부대비 86억원)

○ 공사기간 : 3년【서부간선도로 지하도로 개통 후 착수(2021년 예정)】

□ 추진현황 및 향후계획

○ 2015. 8. 31          : 타당성조사 및 기본계획용역

○ 2016.01 ~ 2017.12 : 기본설계 용역 시행(예정)

○ 2018.01 ~ 2019.12 : 실시설계 용역 시행(예정)

○ 2021.01 ~ 2023.12 : 공사시행(예정)

4		양평1유수지 CSOs 저류조 설치사업

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 양평1유수지 CSOs 저류조 설치사업

○ 위    치 : 양평유수지(영등포구 선유로 35길 22)

○ 규    모 : CSOs 저류조 46,000㎥

○ 사 업 비 : 319억원(공사비 281억원, 부대비 38억원)

○ 공사기간 : 2016. 5 ~ 2018. 5(24개월)

□ 추진현황 및 향후계획

○ 2014. 7. 3.             : 타당성조사 및 기본계획

○ 2014.12 ~ 2016.3.26 : 기본 및 실시설계 용역 시행

○ 2016. 5 ~ 2018. 5    : 공사시행(예정)