문서번호	보수과-928
결재일자	2012.3.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		보수과장	소장
협조
	주무관

영상감시장치 구매 설치 발주 계획 변경

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2012. 3

광암아리수정수센터

(보    수    과)

영상감시장치 구매 설치 발주 계획 변경

장기간 사용으로 노후되고 기능이 저하된 수질관리용 및 방호용 영상감시장치(CCTV) 교체를 위한 발주를 아래와 같이 변경 시행하고자 함.

사업개요

사 업 명 : 영상감시장치 구매 설치

사업기간 : 2012년 3월 ~ 5월 31일

규    모 : 총12개소(수질용:7개소, 방호용:5개소)

사 업 비 : 60,000천원

예산과목 : 자본적지출,가동설비자산,기계장치,정수장시설정비,시설비등

발주방법 변경 사유

- 시청(계약심사과-4320,2012.3.15) 계약심사시 상기사업에 대해 정보통신공사업법 제2조 및 동법시행령 제2조에 의거 단순한 물품구매가 아닌 정보제어 보안설비공사[폐쇄회로텔레비전(CCTV)설비]로 판단한다는 사유로 반려됨.

⇒ 설치공사 부분 별도발주

변경내용

- 당초 : 구매설치로 단일발주

- 변경 : 공사와 물품구매로 분리 발주

발주방법

구분	영상감시장치 구매	영상감시장치 교체 설치공사
계약방법	제한경쟁입찰 (중소기업자간 경쟁제품)	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 제1항 제5호에 의거 소액임으로 수의계약
입찰자격	중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제8조에 의한 중소기업자로서 ‘중․소기업․소상공인 및 장애인기업확인요령’에 따라 발급된 중소기업확인서를 소지한 업체 또는 동법률 제33조에 의한 간주 중소기업으로서 “보안용카메라(G2B물품분류번호:46171610)"분야 직접생산확인증명서를 소지한 업체(단, 개찰일의 전일 이전에 발급된 것으로서 유효기간내에 있어야 함)로써 주된 사무실이 경기도에 소재한 업체	정보통신공사업법 제14조의 의한 정보통신공사업 자격업체
사업비	54,054,000원	5,946,000원

향후계획

영상감시장치 구매

- 본청 계약심사 요청 : 즉시 시행

- 심사결과후 발주 : 3월중

- 납품완료 : 5월초

영상감시장치 교체 설치공사

- 영상감시장치 구매 계약 완료 후 발주 : 4월중

- 공사준공 : 5월중

첨부 :  1. 시청 계약심사 반려문서 1부.

2. 물품구매 매입요구서 1부.

3. 물품 산출기초조사서 1부.

4. 교체 설치공사 설계서 1부.  끝.