『아리수통합정보센터 고화질 영상통합감시시스템 구축관련』

영상통합감시장비 현장 점검계획

『’16년 아리수통합정보센터 고화질 영상통합감시시스템 구축』관련  정수센터 □ 수도사업소 영상통합감시장비에 대한 현장점검을 실시하여 사업을 효율적으로 추진코자 함.

□ 사업현황

○ 사 업 명 : 아리수통합정보센터 고화질 영상통합감시시스템 구축용역

○ 사업개요

- 고화질 영상통합감시장비(H/W) 설치(서버, 스위칭허브 등 25대)

- 고화질 영상통합감시 프로그램(S/W) 개발 □ 구축

○ 사업기간 : ’16. 4. 29. ~ 9. 25.

○ 사업금액 : 154,290천원

○ 계 약 자 : ㈜서광기전(대표 : 김광일)

□ 점검계획

○ 점검목적 : 고화질 CCTV 영상통합감시시스템 구축에 따른 사전 현장점검

○ 점검대상 : 10개소(정수센터 3개소, 수도사업소 7개소)

○ 점검기간 : ’16. 6. 15. ~ 6. 28.(10일간)

○ 점검일정

구분	정수센터			수도사업소
	광암	뚝도	영등포	중부	서부	동부	강서	남부	강남	강동
점검일	6.15. (수)	6.16. (목)	6.17. (금)	6.20. (월)	6.21. (화)	6.22. (수)	6.23. (목)	6.24. (금)	6.27. (월)	6.28. (화)

○ 점 검 자 : 3명(계약업체 2명, 급수운영과 1명)

※ 필요시 시스템 유지관리 용역업체[(주)팬지아이십]와 합동 점검

○ 점검내용

- 현장의 저화질, 고화질 CCTV 카메라 설치수량 전수 조사

- 기존 저화질 영상통합감시장비(DVR, NVR, VDA) 철거물량 파악

- 신규 고화질 영상통합감시장비(스트리밍서버, 스위칭허브) 설치위치 확인

- 전원케이블, 영상신호케이블 등의 포설위치 및 경로 점검

- 현장 장비배치도, 케이블 포설위치도 및 전체 시스템 구성도 작성

- 영상통합감시장비 철거(저화질) 및 설치(고화질)에 따른 업무협의

※ ’16년 고화질 영상통합감시장비 설치계획

장비명	계	통합 정보 센터	정수센터			수도사업소
			광암	뚝도	영등포	중부	서부	동부	강서	남부	강남	강동
뷰어서버	2대	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
스트리밍서버	13대	-	2	2	-	2	1	1	1	2	1	1
스위칭허브	10대	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1