예비준공검사 감리원 검토의견

1. 공사개요

공 사 명	2013년 강동수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사
계 약 일	2013.04.25	착공일	2013.05.01	준공예정일	2014.04.30
계약금액	2,088,587,750원

2. 정산 내역

계약금액	기 성 금 액			잔여금액	비 고
	전 회(1차~5차)	금회(6차정산)	누 계
	34%	7%	41%	59%
2,088,587,750	702,570,000	154,670,000	857,240,000	1,231,347,750

3. 기성물량 내역

공종	내용	단위	설계	누계	잔량	비고
토공	토사절취	㎥	1,617	628	989
	인력터파기	㎥	3,020	1,618	1,402
	기계터파기	㎥	5,991	1,608	4,383
	잔토처리	㎥	4,654	3,558	1,096
포장공	보조기층공	a	35	7.37	28.74
	혼합기층공	a	27	6.27	20.73
	아스팔트포장(띠포장)	a	142	53.64	88.36
	아스팔트 중층공	a	21	12.08	8.92
부대공	휀스 설치 철거	개소	7,000	4,796	2,204
	교통정리원	시간	3,100	1,600	1,500
사급자재	보조기층재	㎥	8,000	2,743	5,257
	혼합기층재	㎥	4,000	1,717	2,283

4. 지적사항

- 지적사항 없슴

5. 검토의견

- 특별한 지적사항은 없으며, 본 공사 추진에 만전을 기하고자 함.

시공감리원 ㈜이준엔지니어링 이사 전기성  (인)