예비준공검사 결과보고(6차-최종)

1. 공사명 : 2013년 강동수도사업소 관내 포장도로 굴착복구공사

2. 시공현황 및 점검결과

계약금액	기 성 금 액			잔여금액	비 고
	전 회(1차~5차)	금회(6차정산)	누 계
	62%	7%	69%	31%
2,088,587,750	1,281,269,000	154,670,000	1,435,939,000	652,648,750

3. 기성물량 내역

공종	내용	단위	설계(변경)	기성누계	잔량	비고
토공	토사절취	㎥	1,617	655	962
	인력터파기	㎥	3,020	1,640	1,380
	기계터파기	㎥	5,991	2,336	3,655
	잔토처리	㎥	4,654	4,334	320
포장공	보조기층공	a	35	7.37	27.63
	혼합기층공	a	27	6.27	20.73
	아스팔트포장(띠포장)	a	142	111.61	30.39
	아스팔트 중층공	a	21	12.76	8.24
부대공	휀스 설치 철거	개소	7,000	6,717	283
	교통정리원	시간	3,100	3,149	-49
사급자재	보조기층재	㎥	8,000	7,782	218
	혼합기층재	㎥	4,000	3,019	981

4. 기타 점검내용

항 목	점검결과
예비준공부분 내역이 설계도서대로 시공되었는지 여부	적 정
사용된 자재의 규격 및 품질에 대한 시험의 실시 여부	적 정
관급자재의 수불상태	적 정
주요 시공과정 촬영과 사진의 확인	적 정
포장면 시공상태 확인 및 코어 채취	적 정
감리원의 예비 준공검사원에 대한 사전검토 의견서	적 정
기타 검사자가 필요하다고 인정하는 사항	적 정

5. 종합의견

- 현재까지 전체 공정율 69%이상 진행되었으며, 상기 검사항목 점검결과

완료된 공정은 관련 규정대로 시공되었음.

2014. 04.

검사자 : 지방시설주  사  김용현  (인)

지방시설주사보  이용호  (인)

입회자 :  시공감리원   전기성  (인)

현장대리인  김경범 (인)