- 서울시 주민참여예산 -

지역사회 네트워크형 공정무역 매장 설립

직 책	성 명	전화번호
사회적경제과장	이승복	2241-3142
협동조합지원팀장	맹홍재	2241-3921
담당자	선보영	2241-3923

설립개요

위   치 : 동소문동 1가 1-4 ※ 성북 제1가압장

※ 기존 설립예정지(성북동 119-1) 보다 유동인구가 많고 시설물 설치 관리 등 매장 설립과 관리에 용이한 장소로 부지 변경

가용부지 : 약 500㎡(151평)

건물면적 : 실측 연면적 260.3㎡(79평), 지상2층

토지이용계획 : 도시계획시설(문화시설 결정고시 - 1997. 6월)

소 유 자 : 토지(성북구청장), 건물(서울시 상수도사업본부 – 성북구 무상양여)

지역지구 : 제2종일반주거지역, 역사문화미관지구, 문화시설

운영방법 : 리모델링 후 공정무역 전시 및 판매장 등으로 활용

소요예산 : 250백만원 ※ 서울시 주민참여예산

설립내용

층 별	면 적	용 도	비 고
계	239㎡
3층	119.5㎡	교육장 및 세미나실 등	리모델링
1층	119.5㎡	공정무역 판매장 및 전시관	리모델링

규모 및 공간활용

※ 별도 1층 외부 공간(28.8㎡, 약 8평)을 테라스로 꾸며 커피 시음이 가능하도록 조성

주요 공사내용

- 기존 1,2층 건물에 1개층을 증축하여 총 3개층으로 리모델링

- 안전진단 실시 후 설계용역 실시(구조검토, 도면작성, 공사물량 산출 등)

- 수도, 배관, 전기통신 설비 및 증축분의 주차공간 확보

- 1층과 2층이 각각 별도로 이용하는 출입문 및 계단 설치

추진경위

사회적경제과-3968(2013.04.12)호 : 2014 회계연도 서울시 주민참여예산 사업 제출 [사업명 : 지역사회 네트워크형 공정무역 매장 설립]

기획경영과-3956(2013.05.16)호 : 서울시 주민참여예산 제안사업 검토 요청

사회적경제과-4233-(2013.05.23)호 : 서울시 주민참여예산 제안사업 검토결과 제출

지역회의 심사(성북구 참여예산위원회) : 2013. 6. 4(화)

서울시 주민참여예산분과위원회 심사 : 2013. 6. 20(목) ~ 7. 18(목)

사업신청자 제안설명 : 2013. 6. 20(목) 21:01

- 설명장소 : 서울시청

- 설 명 자 : 페어트레이드코리아 이미영대표

사업신청 권역별 현장확인 : 2013. 6. 26(수) 14:00 ~ 14:30

- 장    소 : 성북구  성북동 119-1

- 현장확인 위원 : 서울시 주민참여예산 위원 길춘만, 정요택

- 참 석 자 : 이미영대표, 사회적경제과 및 기획경영과 직원 3명

분과위원회 본심사 : 2013. 7. 4(목) ~ 7. 18(목)

서울시 주민총회(참여예산 한마당) 개최 : 2013. 7. 26(금) ~ 27(토)

- 장  소 : 서울시청사 內 일대

- 안내자 : 페어트레이드코리아 이미영 대표, 페어트레이드코리아 박영주

서울시 주민참여예산 선정결과 발표 : 2013. 7. 28(토) 20:00

서울시 예산(안) 편성요구 : 2013. 08. 14

공정무역 매장 설립을 위한 타부지 검토 보고 : 2014. 1. 16

- 내  용 : 기존 예정지가 부적절함에 따라 타 부지 검토

「공정무역 도시, 성북」추진을 위한 공정무역 매장 설립방안 검토 보고

: 2014. 2. 26(수) 17:34

공정무역제품 전시·판매장 사용계획 확정 : 2014. 7. 29

구조안전진단 용역 발주 : 2014. 9. 22

2014년 요구예산 세부산출내역           (단위:천원)

구 분	2014 요구	산 출 내 역
계	250,000	예산내역	250,000
지역사회네트워크형 공정무역 매장 설립 (주민참여)	250,000	자치단체경상보조금	50,000
		인건비	36,000
		사무기자재 구입 등	14,000
		자치단체자본보조금	200,000
		리모델링비	200,000

￭ 리모델링 : 200,000천원

- 가설공사 : 16,375천원

- 기초공사 : 31,675천원

- 컨테이너공사 : 31,285천원

- 외부공사 : 12,080천원

- 창호공사 : 23,200천원

- 내부공사 : 39,889천원

- 전기공사 : 5,613천원

- 냉난방공사 : 12,750천원

- 주방 및 화장실 공사 : 10,900천원

- 사인공사 : 8,500천원

- 기타공사 : 7,733천원

￭ 인 건 비 : 36,000천원

- 관리 및 청소인력 : 1,500천원*2명*12월 = 36,000천원

￭ 사무기자재 및 집기류 등 구입 : 10,000천원

- 카페 기기 구입 : 5,246천원

- 기타 카페 집기류 등 구매 : 957천원

- 테이블, 수납장 등 제작비 : 1,205천원

- 사무실 컴퓨터, 프린트 등 구매 : 1,294천원

- 간판, 싸인물, 판매대 등 제작비 : 1,298천원

￭ 운영비 : 4,000천원

- 초기물품 구매 및 재고, 카페 재료비 : 2,000천원

- 홍보비 : 1,000천원

- 일반관리비 : 1,000천원

예산(안) 산출근거

소요예산 신청

구분	예산액	신청금액	잔액	비고
시비	250,000천원	250,000천원	0원	사업비 전액 신청

기대효과

공정무역 커피 판매장 및 홍보관을 통하여 지역 네트워크 구성 및 공정무역 저변 확대

매장수익을 지역사회 다문화 지원기금으로 적립한 가치순환형 모델 개발

관내 대사관저와 다문화가족지원센터, 외국인근로자센터 등 외국공동체 구성원들과 국가간 교류가 활발한 성북구의 특성을 활용한 공정무역 분위기 조성에 이바지

- 성북구 관내 대사관저 37개, 거주 외국인 : 8,800여명

- 다문화 음식축제, 외국인 문화행사 등과 공정무역 홍보를 연계하여 추진

※ 매장위치가 대사관저가 밀집되어 있는 성북동 입구에 위치하고 있어 지리적 효율 극대화

「공정무역 도시, 서울」 및 공정무역 시범 자치구로서 「공정무역 실천구, 성북」추진에 기여

위치도 및 리모델링(안)