독서근린공원 지하주차장 건설

▫ 사업부서 : 양천구청 교통지도과                    팀  장 : 한영범(2620-3732)

담당자 : 최종철(2620-3736)

▫ 사업개요

○ 위    치 : 양천구 신월동 987

○ 규    모 : 부지면적 3,980㎡(연면적 8,411.96㎡), 250면

○ 총사업비 : 14,572.3백만원(시비 8,743백만원, 구비 5,829.3백만원)

○ 사업기간 : 2010.7.~2015.12.

▫ 추진현황 및 향후 계획

○ 추진현황

- 2010. 7.25 독서근린공원 지하주차장 건설계획 수립

- 2010.10.20~11.2.18 : 기본계획 및 타당성 조사 용역 실시

- 2012. 7.27 시 도시공원위원회 자문 심의(조건부 동의)

- 2012. 9.27 시 투융자심사(조건부 추진)

- 2013. 1. 4 기본 및 실시 설계용역 발주

- 2014. 5.15 공사착공(토목)

- 2015. 4.30 터파기공사 완료

- 2015. 6.30 지하2층 철근 콘크리트 공사 진행중

○ 향후계획

- 2015. 9월 전기, 정보통신, 조경공사 진행

- 2015.11월 토목공사완료 및 개장예정

▫ 예산배정계획(당해연도 예산액 기준)

(단위 : 천원)

예산과목	소 계	기배정액	배정요구액	배정잔액	산출내역
소 계	3,523,000	0	3,523,000	0
자치단체 자본보조	3,523,000	0	3,523,000	0	- 공사비 : 3,523,000

▫ 월 수시배정 요구 사유

○ 주차장 건설사업 추진 일정에 따른 예산 배정 요구

▫ 검토의견

○ 의견없음