성동소방서 신설 부지 매입 계약

팀 장 : 김옥석	☎ 02-452-0797
담당자 : 신종춘	☎ 02-452-0797

□ 사업부서 : 광진소방서             (재배정 부서 : 소방행정과)

□ 사업개요

○ 근     거 : 2014년도 예산편성

○ 위     치 : 서울시 성동구 행당동 1-3(예정지번)

○ 규     모 :  2,970㎡(900평)

○ 총사업비 : 금17,600,000천원

○ 계약금액 : 금17,523,000천원(2015. 6.26. 계약예정 금액)

○ 4개년 연도별 집행계획

- 2014년 : 2,994,500천원

- 2015년 : 4,868,000천원

- 2016년 : 4,868,000천원

- 2017년 : 4,792,500천원

※ 분할납부(2015~2017년,  3개년)이자 없음 : 무이자 합의

□ 추진현황 및 향후 계획

○ ‘14. 01. : 성동소방서 건축 기본계획 수립 및 도시기반시설본부 건축의뢰

○  ‘14. 05. 01 : 행당 도시개발계획(안) 고시

○ ‘14. 06. ～ 09. : 설계용역 공고 및 작품접수, 계약

○  ‘14. 06. 26 : 성동소방서 신설 토지 매매계약(LH공사 ↔성동소방서)

○ ‘14. 10. ～ ‘15. 05. : 기본 및 실시설계(8개월)

○ ‘15. 06. ～ ‘15. 08. : 공사발주 및 입찰공고, 공사계약

○ ‘15. 09. ～ ‘17. 05. : 공사시행(21개월)

○ ‘17. 06. 30 : 청사 인계인수

□ 예산배정계획                                          (단위 : 천원)

예산과목	소계	기배정액	배정요구액	배정잔액	산 출 내 역
소 계	2,994,507	0	2,994,500	7
시설비	2,994,507	0	2,994,500	7	붙임 : 매매계약서(안) 참조 계약보증금 : 1,752,300,000원 1차 할부금 : 1,242,200,000원

※ 기배정액 반드시 작성, 공란없이 모두 기입

□ 배정사유

○ 2014년 세출예산편성에 반영된 사업 : 성동소방서 신설 토지매입비

□ 서울위키 등록 여부

○ ‘14년 위키 최근등록일 :

○ ‘13년 위키 최근수정일 :

□ 첨부 : 성동소방서 신설 부지 매매계약서(협의안) 1부. 끝.