신림 2 빗물펌장 설치공사

□ 사업부서 : 도시안전실 하천관리과

□ 사업개요

○ 위    치 : 관악구 신림동 496번지 일원

○ 규    모 : 집수정 V=5,300㎥, 토출량 V=800㎥/min

○ 사업기간 : 2013. 1. 4 ~ 2014. 12. 30(예정)

○ 총사업비 : 14,000백만원 (‘14년 예산 7,223백만원)

□ 추진현황 및 향후 계획

○ 2011. 03 ~ 2012.10 : 기본 및 실시설계

○ 2013. 1.4 : 계약 및 착공

○ 2013. 1∼2013. 5 : 공사중 교통소통대책 수립 및 설치

○ 2013. 6~2013.12 : 흡수정 1차분 구조물 시공완료

○ 2014. 1~2014. 6 : 흡수정 2차분 구조물 시공완료

○ 2014. 6~2014. 8 : 설비(전기, 기계) 공사 및 펌프가동

○ 2014. 12 : 준공(예정)

□ 2014년 예산배정계획

(단위 : 천원)

예산과목	‘14년 예산액	계	기배정액	금회 배정요구액	배정잔액	산 출 내 역
계	7,223,000	7,223,000	2,869,604	4,159,496	193,900
시 설 비	7,029,100	7,029,100	2,869,604	4,159,496	0	∘ 시설공사 3차 계약(발주) ∘ 관급자재 추가구매 1 식 ∘ 기타 1 식
감 리 비	193,900	193,900	0	0	193,900

□ 배정사유

○ 공사 3차 발주 계약 및 관급자재 추가구매 등