송정, 사근빗물펌프장 증설공사

□ 사업부서 : 도시안전실 하천관리과

□ 사업개요

○ 위    치 : 성동구 송정동 81-5, 사근동 198-5

○ 규    모 : 펌프증설, 송정 Q=616㎥/min, 사근 Q=1,020㎥/min

○ 사업기간 : 2012. 12. 27 ~ 2014. 10. 31

○ 총사업비 : 17,398백만원 (‘14년 예산 5,522백만원)

□ 추진현황 및 향후 계획

○ 2011. 03 ~ 2012.10 : 기본 및 실시설계

○ 2012. 12. 27     : 계약 및 착공

○ 2013. 4~2014. 2 : 송정, 사근펌프장 토출관로 시공완료

○ 2014. 2~2014. 5 : 송정, 사근 구조물 공사

○ 2014. 5~2014.10 : 설비(전기, 기계)공사 및 펌프가동

○ 2014. 10 : 준공(예정)

□ 2014년 예산배정계획

(단위 : 천원)

예산과목	‘14년 예산액	계	기배정액	금회 배정요구액	배정잔액	산 출 내 역
계	5,522,000	5,522,000	4,237,618	800,000	484,382
시 설 비	5,427,900	5,427,900	4,143,518	800,000	484,382	∘ 시설공사(3차)시공물량 증가에 따른 설계변경 ∘ 폐기물처리용역(2차)발주 ∘ 관급자재 추가구매 1 식
감 리 비	94,100	94,100	94,100	0	0

※ 기 배정액 4,237,618천원 (방재시설부 1,000,000천원, 설비부 3,237,618천원)

□ 배정사유

○ 시설공사(3차)시공물량 증가에 따른 변경계약 및 관급자재 추가구매 등