송정, 사근빗물펌프장 증설공사

□ 사업부서 : 도시안전실 하천관리과

□ 사업개요

○ 위    치 : 성동구 송정동 81-5, 사근동 198-5

○ 규    모 : 펌프증설, 송정 Q=616㎥/min, 사근 Q=1,020㎥/min

○ 사업기간 : 2012. 12. 27 ~ 2014. 12. 30

○ 총사업비 : 17,398백만원 (‘14년 예산 5,522백만원)

□ 추진현황 및 향후 계획

○ 2011. 03 ~ 2012.10 : 기본 및 실시설계

○ 2012. 12. 27     : 계약 및 착공

○ 2013. 4~2014. 2 : 송정, 사근펌프장 토출관로 시공완료

○ 2014. 2~2014. 8 : 송정, 사근 건축 구조물 공사 완료

○ 2014. 9~2014.12 : 단지내 배수로 설치, 수목식재 등 부대공사 중

○ 2014. 9~2015. 1 : 설비(전기, 기계)공사 및 펌프 시운전 등

○ 2015.  1         : 공사완료 및 시설물 인수․인계

□ 2014년 예산배정계획

(단위 : 천원)

예산과목	‘14년 예산액	기배정액	금회 배정요구액	배정잔액	산 출 내 역
계	5,522,000	5,058,618	419,482	43,900
시 설 비	5,363,000	4,943,518	419,482	0	∘ 시설공사(3차)시공물량 증가에 따른 설계변경 (운영부서 요구사항 반영 등)
감 리 비	159,000	115,100	0	43,900

※ 기 배정액     5,058,618천원

- 방재시설부 1,800,000천원 (시설비 1,800,000)

- 설비부     3,258,618천원 (시설비 3,143,518, 감리비 115,100)

□ 배정사유

○ 시설공사(3차)시공물량 증가에 따른 변경계약 등