창신길 83 공영주차장 건설

▢ 사업부서 : 종로구청 주차관리과                 팀  장 : 이규동(2148-3341)

담당자 : 정현아(2148-3342)

▢ 사업개요

○ 위      치 : 창신길 83(창신동 641번지 외 2필지 / 2,070.8㎡)

○ 지역․지구 : 제2종일반주거지역, 문화재영향성검토구역

○ 토지 및 건물 : 목조건물 2동

지 번	지 목	면적(㎡)	소유자	비 고
계	-	2,070.8	-	-
창신동 641	대	671.4	유월득 외 9인	3필지 소유지분 동일함
창신동 641-1	대	722
창신동 641-2	대	677.4

○ 도시계획시설 : 주차장, 청소년수련시설

○ 규       모 : 연면적 8,306.74㎡ (지하 4층 ~ 지상 3층)

- 주  차  장 : 지하 4층 ~ 지상 1층 245면 (시설면적 : 6,806.74㎡)

‧ 공영주차장 ⇒ 일반승용차 165면, 이륜자동차 80면 (특별회계 건설)

- 청소년문화의집 및 도서관 : 지상 2층 ~ 지상 3층 (연면적 : 1,500㎡)

○ 소 요  예 산 : 21,331백만원

(단위:백만원)

구분	계	사업비		재원구분
		토지매입비	건설비	국비	시비	구비
계	21,331	7,000	14,331	1,758	9040.5	10,532.5
주차장	15,939	7,000	8,939		7,969.5	7,969.5
도서관	1,394		1,394	558	272	564
청소년문화의집	3,998		3,998	1,200	799	1,999

○ 사업기간 : 2014. 2. ~ 2018. 4.

▢ 추진현황 및 향후 계획

○ 2013.01.16. : 창신동 신년 인사회 주민건의

(공영주차장, 사회복지시설, 청소년수련시설 등 건립 요청)

○ 2013.06.13. : 서울시 창신‧숭인 재정비촉진지구 지정 해제 추진 발표 (재정비과)

○ 2014.02.03. : 서울시 투융자심사분석 의뢰 (주차계획과)

○ 2014.05.23. : 중앙 투융자심사분석의뢰 (서울시 → 안전행정부)

○ 2014.07.14. : 중앙 투융자심사분석의뢰 결과 ⇒ 조건부 의견

- 국비 지원계획 확정 후 가용재원 범위에서 주차장은 향후 수요를 감안하여 적정규모로 확대 ⇒ 213억원 (국비 17, 시비 90, 구비 106)

○ 2014.08. ~ 2014.12. : 도시계획시설 결정도서 작성 및 실시계획인가

○ 2015.  6. ~ 2016. 5.  : 보상시행

○ 2015. 10. ~  2016. 9.  : 기본 및 실시설계 용역

○ 2016.  6. ~  2016.  9.  : 문화재발굴조사 시행

○ 2016. 10. ~ 2018. 4.  : 건설공사 시행 및 완공

▢ 예산배정계획(당해연도 예산액 기준)

(단위 : 천원)

예산과목	소 계	기배정액	배정요구액	배정잔액	산출내역	비고
소 계		-	4,150,000	-
자치단체 자본보조		-	4,150,000	-	토지보상금

- 구비 예산액 년도별 기재(기배정액 포함) :  4,150,000천원