<예산배정요청>

강남순환도시고속도로(4공구) 건설공사

담당자 : 시희식(행정8662)

□ 사업부서 : 도시기반시설본부 토목부

□ 사업개요

○ 위    치 : 금천구 독산동 ~ 광명시 소하동 ~ 금천구 시흥동

○ 규    모 : 폭 왕복4~ 8차로, 연장 2.5km

○ 총사업비 : 324,760백만원(2014예산 42,765백만원)

○ 사업기간 : 2001. 12. 29 ~ 2016. 5. 19

□ 추진현황 및 향후 계획

○ 2004.12 ~ 2009.7.29 : 기아대교 개수공사 완료

○ 2009.1~ 2014. 2 : 본선부 교각공사 착수

- 소하JCT Up-Ramp P1~ P8, Down Ramp P4 ~ P6 교각 완료

- 소하JCT 본선 : P2.P3.P4.P5.P6,P8.P9 교각완료

- 기아천교 : 교량시공 완료

○ 2014. 2 ~ 소하JCT 본선교량 및 램프교량 상부구조 시공

□ 예산배정 요구

(단위 : 천원)

구분	‘14년 예산액	기배정액	배정요구액	배정잔액	산출잔액
계	42,765,000	-	40,765,000	2,000,000
시 설 비	39,665,000	-	39,665,000	-
감 리 비	1,100,000	-	1,100,000	-
이 전 비	2,000,000	-	-	2,000,000	한국도로공사

□ 배정사유(자세히 작성)

○ 소하JCT 본선교 및 램프교 교각 41기 시공완료

○ 본선, 램프교 강교 가설 및 교량슬래브 콘크리트 타설 완료 (`15.5)

○ 종점부 시흥3동 지하차도 완료(2차로 - 폭12m, 연장 157m)

□ 검토의견(예산과 작성)