<예산배정요청>

서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사

□ 사업부서 : 도시기반시설본부 토목부    담당자 : 홍상필(☎3708-2568)

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 서빙고 고가교 및 강변북로 연결로 개선공사

○ 위    치 : 용산구 보광동 ~ 주성동(서빙고로 ~ 강변북로)

○ 규    모 : 기존교량철거 : PSC Beam교, RC옹벽

- 기존교량 보수보강 : 경원선통과구간(1식)

- 교량공사: 강변북로구간(B=6.4m,L=115m)

두무개길구간(B=10.4m,L=290m)

○ 총사업비 : 27,300백만원

○ 사업기간 : 2010.12.05. ~ 2016.4.30.

□ 추진현황 및 향후 계획

○‘08. 10. 04 : 서빙고고가교 철거 및 강변북로 연결로 개선계획(부시장 방침483호)

○‘09. 03 ∼’10. 09 : 기본 및 실시설계

○‘10.12 : 공사발주 및 계약

○‘11.02.∼‘11.11: 공사중단(2011년 예산 미반영)

○‘11.11.14 : 공사재개

○‘13. 06 : 임시교량 개통(교통우회)

○‘14. 05 : 기존교량 철거

○‘15.10.31 : 본선부 임시개통

○‘16. 04 : 공사준공

□ 예산배정계획

(단위 : 천원)

예산 과목	계	재배정부 서	기배정액	배정요구액	배정잔액	산출내역
계	1,463,974	-	-	1,141,600	322,374
시설비	1,322,374	토목부	-	1,000,000	322,374	시설공사(5차) : 899백만원 폐기물처리용역 : 27백만원 관급자재 : 40백만원 이설비 : 34백만원
감리비	141,600,	토목부	-	141,600	-	감리용역 : 141백만원

□ 배정사유(자세히 작성)

○ 시설공사(5차), 폐기물 처리용역(4차), 감리용역(6차) 잔여계약분 이행