문서번호	도로계획과-11191
결재일자	2017.8.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	간선도로계획팀장	도로계획과장		안전총괄관
협 조
	예산3팀장

예산변경(통계목) 및 집행 계획

- 안양교 확장 -

2017.  7.

안전총괄본부

(도로계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

예산변경(통계목) 및 집행 계획

「안양교 확장」의 감리비 부족으로 현재 진행 중인 2차공사의 건설사업관리용역을 시행할 수 없기에 통계목 변경(시설비 → 감리비)하여 부족 감리비 확보하고자 함.

□ 사업개요

○ 사 업 명: 안양교 확장

○ 위    치: 구로구 개봉동 198-32~구로동 693-2

○ 규    모: 도로확장 폭 4~5 → 6차로, 연장 1,110m

(안양교 275m, 광복교 67m, 주변도로확장 768m)

○ 사업기간: 2006. ~ 2019.09.

○ 사 업 비: 83,284백만 원

(단위: 백만 원)

구 분		총사업비	기 투 자	2016	2017	2018이후
계		83,284	4,700	4,000	10,000	64,584
시설비	설계비	1,900	1,900
	보상비	589			400	189
	공사비	74,995	2,800	3,500	9,100	59,595
감 리 비		5,800		500	500	4,800

□ 추진현황 및 향후계획

○ '06.06.~'07.11.	: 안양교 기본설계 시행

○ '07.12.~'09.02.	: 안양교 실시설계 시행

○ '12.05.~'15.02.	: 실시설계 보완용역 시행

○ '15.09.23.	: 투자사업 심사(적정)

○ '16.04.01.	: 시설공사착공(시공사: ㈜케이씨씨건설)

○ '16.04.27.	: 감리용역착수(감리사: ㈜동부엔지니어링 외2)

○ '16.08.23.	: 안양천 하천점용허가

○ '17.03.	: 교통우회용 가교설치 완료

○ '17.04.~05.	: 안양교(구로IC방향) 철거 및 신교 기초공사

○ '17.06.~09.	: 안양교(구로IC방향) 기초공사

○ '17.10.~12.	: 안양교(구로IC방향) 교각 및 상부공

○ '19.09.12.	: 공사완료 예정

□ 현안사항 및 검토의견

○ '17년 감리비 예산은 '16년과 동일하게 5억 원 배정받아 건설사업관리용역(2차) 추진 중에 있으나, 감리비 부족으로 현재 진행중인 2차공사 준공기한(’18.01.31)보다 적게 계약(’17.11.28).

○ 금년에는 안양교 구교철거, 신교 건설, 남부순환로 보도공사 등 본격적 공사시행으로 감리원 추가 투입(중급 1명, ’17.5.18 ~)

○ 상기와 같이 감리원 추가 투입 시 '17.10.18.까지만 감리용역 시행 가능하며 2차공사 준공기한까지 감리용역 추진하려면 264백만 원의 감리비 추가 확보 필요

○ 금년도 보상 예정이었던 목감로 구간, 광명시에서 보상 추진하기로 협의

- 금년 확보한 보상비 400백만 원 집행 불필요

○ 보상비 통계목 변경(시설비 → 감리비)하여 부족 감리비 확보하고자 함

※ 감리용역 총사업비 변동사항 없음

□ 조치계획

○ 금년 불용예정인 시설비(보상비)중 일부(264백만 원)를 통계목 조정(시설비→감리비)하여  감리비로 집행토록 예산 조정

○ 예산변경 내역

(단위 : 백만 원)

예 산 과 목					예산 현액	변경액		변경 후 예산액
정책	단위	세부	편성목	통계목		증	감
도로 건설	간선도로망확충 (도시개발특별회계)	안양교 확장	시설비 및 감리비	시설비 (401-01)	9,500	-	264	9,236
				감리비 (401-02)	500	264	-	764

붙임: 1) 도시기반시설본부 요청공문 1부.

2) 건설사업관리용역(2차) 변경 설계서 1부.  끝.