예산 변경사용 요구서

<물순환안전국 물재생계획과>

○ 세부내역

(단위 : 천원)

예 산 과 목					예산현액	사업비변경		변경후 예산액	비고
정책	단위	세부	편성목	통계목		증	감
하수시설 관리	하수관로 정합정비	오류4 배수분구 하수관로 종합정비	시설비 및 감리비	시설비 (401-01)	4,730,000	-	49,300	4,680,700
				감리비 (401-02)	270,000	49,300	-	319,300

○ 변경사유

- 건설사업관리 용역 추진 중 물가변동으로 인한 계약금액 조정분(2회 및 3회)에 대하여 설계변경 시 반영이 필요하나 금년도 배정된 감리비가 부족한 실정으로 ‘17년 예산 중 시설비 일부를 감리비로 변경이 필요함

∙ 2회 물가변동 조정금액 : 27,500천원

∙ 3회 물가변동 조정금액 : 21,800천원

2017. 12.

물순환안전국장 권기욱 (인)

기획조정실장 귀하