예산변경 요구서

한강사업본부 치수과

☐ 예산변경 내역

(단위: 천원)

예산과목					예산현액	변경 요구액		변 경 후 예 산 액
정책사업	단위사업	세부사업	편성목	통계목		증	감
한강공원 이용 및 생태환경 개선	한강 접근체계 개선	한강공원 나들목 증설 및 개선	시설비 및 부대비	시설비 (401-01)	3,046,400	125,000	-	3,171,400
한강공원 이용 및 생태환경 개선	한강 접근체계 개선	한강공원 나들목 증설 및 개선	시설비 및 부대비	감리비 (401-02)	125,000	-	125,000	-

☐ 예산변경 사유

○ 나들목 본공사 시행 예산 부족 우려

- 나들목 공사 시행시 병행 되어야 하는 전기공사 및 용역 2건 발주가 동시에 이루어 짐에 따라 ‘21년 편성된 예산만으로 공사 시행에 어려움이 있음

- 공사 및 용역 4건 모두 장기계속계약으로 시행하여야 하며 1차분 확보예산만으로 본공사 착공(필요자재 구입, 가시설 설치 등)의 최소 필요예산 부족

○ 건설사업관리 용역 시행을 위해 편성된 감리비 불용 예상

- 나들목 공사에 따른 건설사업관리 용역을 시행 예정이었으나, 건설사업관리방식 검토결과 서울시설공단 의뢰가 가능하여 건설사업관리 용역 미시행

2021년 7월

한강사업본부장 (인)

기획조정실장 귀하