노후 소방헬기(3호기) 교체사업

Ⅰ.  사업개요

○  사 업 명: 노후 소방헬기 교체 (‘90.4.30도입)

○  사업기간: ‘16～’18년(3년간)

○ 총사업비: 350억원

○ 예산과목: 특수구조단운영/소방항공대운영/자산 및 물품취득비

구 분	계	2016년	2017년	2018년
예산(억원)	350	105	105	140

※ 18년 소방안전교부세 115억원 추가교부 예정(국고보조)

○ 계약체결: 2016.12.12.(월)

- 모 델 명: AW-189

- 제 조 사: Leonardo–inmeccanica–S.p.a (이탈리아)

- 계약금액: USD28,219,599 (32,709백만원)

Ⅱ.  주요 추진경과

○ 소방헬기 교체 추진계획(시장방침 제267호 2015.10.3.)

○ 서울특별시 제5차 공유재산심의회(2015.10.13.)

○ 제264회 서울시의회 공유재산관리계획안 제출(2015.11.30.)

○ 조달청 계약 의뢰 및 사전규격공개(2016.7. 7.~7.16.)

○ 헬기구매 1·2차 개찰[레오나르도 헬리콥터 단독응찰로 유찰] (2016.10.5./11.1.)

○ 수의계약 추진(2016.11.3.)

○ 규격 확인(2016.11.22.)

○ 질의회신[행정자치부, 법률지원담당관](2016.11.29.)

○ 가격협상(2016.12.6.~9.)

○ 도시안전건설위원회 설명 및 동의(2016.12.7.)

○ 계약체결(2016.12.12.)

○ 신용장 개설(2016.12.22.)

Ⅲ.  예산집행 저조 사유

○  3년간 추진되는 계속사업으로 헬기도입 계약에 따른 지불시기 미도래

- 계약서상 지불 시기

‣ 물품대의 30%를 L/C 개설 후 지불(2016년 예산집행완료)

‣ 물품대의 30%를 중간공정검사(제작공정 60%)후 지불

– 시기 미도래 (‘18.6월 예정)

‣ 잔금 40%는 지정장소 인도 후 준공대가 지불

–시기 미도래 (‘18.12월 예정)

○ 헬기 제작공정 진행률이 60% 수준일 때 중도금 30%를 지급하게    되어 있으므로 2017.8월 현재 헬기 제작공정이 60%가 진행이      되지 않아 예산집행 지연됨

Ⅳ.  예산집행 대책 및 향후계획

○  예산집행 대책

- 현재 집행보류중인 헬기 중간검수 대금은 연중 환율전망 등을 면밀     히 분석하여 4/4분기 중 전액 신용장개설 후 예치

○  향후계획

- 헬기 중간검수 비용은 2017년 4/4분기내  L/C 개설 후 은행 예치

※ 월별 집행계획                                            (단위 : 억원)

예산 현황		집행액 합 계	7월까지 집행액	향후 집행예상액
예산과목	예산액			소계	8월	9월	10월	11월	12월
물품 및 자산취득비	105	105	0	105			105

작성자	소방항공대장:김용관 ☎ 3706-1930 1팀장:최만익 ☎ 1934 담당:권순철 ☎ 1335