구로역지하차도 외 1개소 수배전반 제작구매설치

과 장 : 박재경	☎ 02-2657-7908
담당자 : 한영호	☎ 02-2657-7961

□ 사업부서 : 강서도로사업소  (재배정 부서 : 기전과)

□ 사업개요

○ 근     거 : 지하차도 수전설비에 대한 안전관리 확보와 효율적 관리를 위해

특고압에서 저압 수전으로 변경하였고, 그에 따라 내구년한이

경과되고 노후된 저압 수배전반의 교체

○ 위     치 : 구로역, 신도림지하차도

○ 규     모 : 저압 수배전반 교체 6면

○ 총사업비 : 160,000천원

○ 사업기간 : 2015. 3 ~ 2015. 7월

□ 추진현황 및 향후 계획

○ ‘15. 03. 05 ~ ’15. 03. 06 : 내부방침 및 예산 재배정 요청

○  ‘15. 03. 09 ~ ’15. 03. 20 : 설계서 작성 및 물품구매 발주(조달의뢰)

○ ‘15. 04. 20 ~ ’15. 07. 20 : 물품제작 및 공사완료

□ 예산배정계획                                          (단위 : 천원)

예산과목	소계	기배정액	배정요구액	배정잔액	산 출 내 역
소 계	160,000	0	160,000	0	금회 재배정요구액 160,000천원
도로시설관리, 기전시설물관리, 터널 및 지하차도 전력설비 개량공사	160,000	0	160,000	0	⚪ 구로역지하차도 90,000천원 - 저압배전반 23,000천원☓3면 = 69,000천원 - 철거․설치 1식 21,000천원 ⚪ 신도림지하차도 70,000천원 - 저압배전반 18,000천원☓3면 = 54,000천원 - 철거 및 설치 1식 16,000천원

※ 기배정액 반드시 작성, 공란없이 모두 기입

□ 배정사유

○ 구로역 및 신도림지하차도의 저압 배전반은 내구년한이 경과되고 노후되어 우천시 안전사고 및 정전사고가 우려되어 수방기간전 교체 필요

□ 첨부 : 방침서, 재배정요구서 등 있을시 첨부