< 예산 재배정요청서 >

사물인터넷 도시조성 예산재배정 요구서

(편성부서 : 정보기획담당관)

□ 사업부서 : 정보통신보안담당관 정보통신기획팀 담당자 : 김유식(☎2133-2864)

□ 사업개요

◦ 사 업 명 : 북촌한옥마을 CCTV 및 무선AP설치공사

◦ 사업내용

- IoT 유·무선 통신 인프라를 조성하여 각종 센서 네트워크 구축

- 북촌한옥마을을 찾은 관광객에게 무선인터넷서비스 제공

- 유동인구 정보수집 및 공유를 통한 관광인구 통계 제공

□ 추진현황

◦ 북촌 사물인터넷(IoT) 인프라 구축 계획 수립(정보기획관) : ’15. 7. 29

◦ 북촌 한옥마을 CCTV 및 무선AP 설치공사시행 : ’15. 8. 16

◦ 북촌 사물인터넷 인프라(무선AP) 구축사업 관련 협조요청(정보기획담당관) : ’15. 9. 30

- 스타트업 센서 설치 공사 설계 반영 요청

◦ 북촌 한옥마을 CCTV 및 무선AP 설치공사 설계변경계획 : ’15. 10. 14

□ 예산 재배정 요청내역

요구금액	산 출 내 역	비 고
8,971천원	▹ 센서 3종 14개소 설치공사비 = 8,003천원 ▹ 한전 수전공사비 4개소 = 968천원	시설비

- 정보기획담당관, 지식정보사회 선도기반구축, 정보화 기반시설 확충, 서울사물인터넷도시조성, 시설비 : 8,971천원

□ 향후계획

◦ 설계변경 의뢰(재무과) : ’15. 10. 20~10. 21