청계천 생태환경 개선공사(2단계)

□ 사업부서 : 물순환안전국 하천관리과

(재배정부서 : 도시기반시설본부 방재시설부)

□ 사업개요

○ 위    치 : 청계천 (청계광장 ~ 중랑천 합류부)

○ 사업기간 : 착공일로부터 18개월

○ 사업내용

- 경사로 신설(2개소), 홍수방지벽(L=145m) 및 산책로 정비(L=3,246m)

-  하상 차수제 천공(2,853공), 하상 여울보 개선(12개소)

-  저수호안 사행성 유도(돌무더기:92개소, 방틀:191개소)

- 조경(보식)분야 1식

□ 추진현황 및 향후계획(2017.1월 현재 공정률 15%)

○ ‘16. 08. 26. : 1차 공사 착공

○ ‘16.  12. 31. : 홍수방호벽 시공완료(L=145m)

○ ‘17.  01.~02.: 2차 공사 착공

- 제1경사로 신설, 하상여울보 및 징검다리 개선 12개소

-  저수호안 사행성 유도(돌무더기:92개소, 방틀:191개소) 등

○ ‘17.  04. 30. : 1차 공사 준공

- 홍수방호벽, 제2경사로 신설, 식생방틀 시공 등

□ 예산 재배정 요청내용

(단위:원)

예산과목	예산액	기배정액	배정요구액	배정잔액	산출내역
소계	1,012,807,620	0	982,807,620	30,000,000
물순환안전국 치수및하천관리 하천복원및정비 청계천개선보완사업 시설비및부대비 시설비	500,000,000 (2017년)	0	470,000,000	30,00,000	- 공사비(2차분) = 305,517,000원 - 관급비(2차분) = 100,000,000원 - 폐기물처리비 = 94,483,000원
	512,807,620(명시이월)	0	512,807,620	0	- 공사비(1차분) = 392,141,000원 - 관급비(1차분) = 120,666,620원

□ 배정사유

○ 2차 공사 발주 및 기 계약된 1차 공사비, 관급비, 폐기물처리비 이월액 배정