<예산재배정요청>

안양교 확장

▫ 사업부서 : 도시기반시설본부 토목부    담당자 : 박운용(☎3708-8662)

▫ 사업개요

○  공 사 명 : 광복교~안양교 도로확장공사

◦  위    치 : 남부순환로(광명시 철산동~구로구 구로동 구로IC)

◦  규    모 : 도로확장 B=23.75~27m, L=1.11km

◦  사업기간 : '12. 6. ~ '19.9.

◦  총사업비 : 83,284백만원(`17년 예산 : 10,000백만원)

▫ 추진현황 및 향후 계획

◦ '11. 6.14. : 도로확장 추진계획(도로계획과)

◦ '12. 6.05. : 실시설계용역 착수

◦ '15. 9.23. : 디자인심의 결과 반영 - 재투자심사 승인

◦ '16. 4.01. : 시설공사 착공

◦ '16. 8.23. : 안양천 하천점용허가 완료(서울지방국토관리청)

◦ '17. 2.28. : 교통우회용 가교 완료

◦ '17. 12월. : 광복교 보도교 완료, 안양교 구로IC방향 설치 완료

▫ 예산배정계획 (도시개발특별회계)

(단위 : 천원)

예산 과목	계	재배정부 서	기 배정액	재배정 요구액	배정잔액	산출내역
계	10,000,000	토목부	-	8,980,000	1,020,000
시설비	9,500,000		-	8,980,000	520,000	제2차 시설공사 및 건설폐기물 처리용역 발주, 관급자재 구매
감리비	500,000		-	-	500,000	제2차 감리용역 발주

▫ 재배정사유

○ 제2차 시설공사 발주, 제2차 건설폐기물 처리용역 발주, 관급자재 구매를 위하여 예산재배정

▫ 검토의견(예산과 작성)

○