노후밸브 정비사업

□ 사업개요

○ 대    상 : 동부수도사업소 관내 고장 및 노후밸브

○ 사업규모

- 고장 및 노후밸브 320개소

□ 추진현황

○ 예산집행 현황(‘16. 9. 30. 기준)

(단위 : 백만원)

예산현액	원인행위		지출
	금액	비율(%)	금액	비율(%)
1,780	467	26.2	467	26.2

○ 추진실적

- 노후밸브 137개소 정비

□ 사업분석 (문제점 등)

○  ‘16. 4. 5일 공사업체 부도로 인한 공사 포기로 사업 중단

□ 추진대책

○ 공사인력 보강, 급수공사 지역(관내 4개구) 7개 연간 단가 업체에 작업 지    시하여 목표 달성

○ 주간 단위로 일일 공정표를 작성 관리 · 감독

○ 183개소 ‘16.11월말까지 정비 완료 목표로 추진

□ 향후계획

○ 연간단가 정산 시행 : 813백만원

○ 불량맨홀정비비 납부 : 400백만원

○ 도로복구비(직·간접) 및 폐기물 처리비 정산 : 100백만원

가압장･배수지 등 시설물유지관리

□ 사업개요

○ 대    상 : 동부수도사업소 관내(성동구외 3) 시설물

○ 사업규모

- 대현산배수지 내부방식, 배수지 8개소, 가압장 4개소, 증압장 11개소,         유량계 58개소, 전식방지시설 58개소 등

□ 추진현황

○ 예산집행 현황(‘16. 9. 30. 기준)

(단위 : 백만원)

예산현액	원인행위		지출
	금액	비율(%)	금액	비율(%)
1,514 (감170)	1,084	71.6	1,025	67.7

○ 추진실적

- 대현산배수지 내부방식공사(사고이월) 준공, 기계분야 연간단가, 전기분야           연간단가, 자동제어용역, 무인경비용역, 배수지·가압장 환경정비 추진 중

□ 사업분석 (문제점 등)

○ 대현산배수지 내부방식공사(사고이월) 감액 : 61백만원(도급,관급비)

○ 환경정비비 불용 예상되어 감배정 조치 : 170백만원(614백만원→444백만원 )

○ 정산 시행 등 추가 예산 집행으로 불용액 최소화 추진

□ 추진대책

○ 해당없음

□ 향후계획

○ 연간단가 및 용역비 정산 시행(계속)

○ 시설장비유지비(부족예산:39백만원) 추가 예산 배정후 집행 예정

가압장･배수지 노후시설 개량

□ 사업개요

○ 대    상 : 용마배수지외 5개소 노후시설물 개량

○ 사업규모

- 용마배수지외 1개소 전동밸브 제어반 개량

- 용마가압장 밸브 제작구매

- 경희증압장외 1개소 감시제어반 개량

□ 추진현황

○ 예산집행 현황(‘16. 9. 30. 기준)

(단위 : 백만원)

예산현액	원인행위		지출
	금액	비율(%)	금액	비율(%)
270	232	85.9	232	85.9

○ 추진실적

- 노후 시설물 개량 및 교체 완료

□ 사업분석 (문제점 등)

○ 본청 계약심사후 발주금액 감액 및 계약에 따른 낙찰차액 발생

□ 추진대책

○ 해당없음

□ 향후계획

○ 해당없음(사업완료)

상수도관 전식방지 공사

□ 사업개요

○ 대    상 : 전식방지공사(3개소) 설치 및 책임감리용역 시행

○ 사업규모

- 정류기 및 저항 박스 설치 – 3set, 양극홀 설치(Φ200×2개) - 3개소

전기인입 및 배관, 배선공사 1식 - 3개소

□ 추진현황

○ 예산집행 현황(‘16. 9. 30. 기준)

(단위 : 백만원)

예산현액	원인행위		지출
	금액	비율(%)	금액	비율(%)
516	349	67.6	286	55.4

○ 추진실적

- 전식방지공사(3개소) 설치완료 준공(9/30) 및 책임감리용역 준공예정

□ 사업분석 (문제점 등)

○ 본청 계약심사후 발주금액 감액 및 계약에 따른 낙찰차액 발생

□ 추진대책

○ 해당없음

□ 향후계획

○ 책임감리용역 준공예정

배수지 물탱크 청소

□ 사업개요

○ 대    상 : 대현산배수지 외 7개 배수지

○ 사업규모

- 대현산배수지외 7개 배수지 항 청소 621,734㎡(상·하반기)

□ 추진현황

○ 예산집행 현황(‘16. 9. 30. 기준)

(단위 : 백만원)

예산현액	원인행위		지출
	금액	비율(%)	금액	비율(%)
516	375	72.6	181	35.1

○ 추진실적

- 상반기 배수지 항 청소 310,867㎡

□ 사업분석 (문제점 등)

○ 본청 계약심사후 발주금액 감액 및 계약에 따른 낙찰차액 발생

□ 추진대책

○ 해당없음

□ 향후계획

○ 2016. 10월 ~ 12월 하반기 청소 후 준공 예정