신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사

▢ 사업부서 : 도시안전실 하천관리과 치수관리팀   팀장 : 최철민,    담당자: 전영부

▢ 사업개요

○ 용 역 명 : 「신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사」

○ 공사규모 : 빗물저류배수시설(D=10m,L=3.6km), 유도수로(D=5.5m, L=1.09km) 등

○ 공사기간 : 2013.05.27 ~ 2016. 05.25

○ 도 급 비 : 금95,391백만원

○ 시 공 사 : 현대건설(주)외 3개사

□ 추진현황 및 향후계획

○ 2013.03.15 : 실시설계적격자 선정

○ 2013.05.27 : 우선시공분 착공

○ 2013.11.22 : 우선시공분 준공

○ 2014.11.07 : 실시설계 적격심의 완료(적격)

○ 2014.12.20. : 시설공사(2차) 시행

▢ 예산배정계획

(단위 : 천원)

예산과목	소계	기배정액	배정요구액	배정잔액	산 출 내 역
계	17,500,000	2,922	15,915,000	1,582,078
시설비	15,915,000	-	15,915,000	-	- 시설공사(2차)발주
감리비	1,545,000	-	-	1,545,000
시설부대비	40,000	2,922	-	37,078

▢ 배정사유(자세히 작성)

○ 실시설계 적격심의를 완료하고 ‘14년 시설비를 배정받아 시설공사(2차) 발주코자 함.

신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 전면책임감리용역

▢ 사업부서 : 도시안전실 하천관리과 치수관리팀   팀장 : 최철민,    담당자: 전영부

▢ 사업개요

○ 용 역 명 : 「신월 빗물저류배수시설 등 방재시설 확충공사 전면책임감리용역」

○ 공사규모 : 빗물저류배수시설(D=10m,L=3.6km), 유도수로(D=5.5m, L=1.09km) 등

○ 감리기간 : 2013.01.07 ~ 2016. 06.24

○ 감 리 비 : 3,439백만원

○ 감 리 사 : ㈜ 수성엔지니어리외 4

□ 추진현황 및 향후계획

○ 2013.01.07 : 감리용역 착수

○ 2012.08.21 : 감리용역(1차) 준공

○ 2013.08.22 : 감리용역(2차) 착수

○ 2015.02.28 : 감리용역(2차) 준공

○ 2015.03.01 : 감리용역(3차) 착수

▢ 예산배정계획

(단위 : 천원)

예산과목	소계	기배정액	배정요구액	배정잔액	산 출 내 역
계	17,500,000	15,917,922	1,545,000	37,078
시설비	15,915,000	15,915,000	-	-
감리비	1,545,000	-	1,545,000	-	책임감리용역(3차) 발주
시설부대비	40,000	2,922	-	37,078

▢ 배정사유(자세히 작성)

○ ‘14년 감리비 예산을 배정받아 감리용역(3차)를 발주코자 함.