전농교 보수․보강공사

▫ 사업부서 : 성동도로사업소(시설보수과)     과장 : 박춘배(2210-1560)

담당 : 김근수(2210-1552)

▫ 사업개요

○ 공 사 명 : 전농교 보수․보강공사

○ 위     치 : 동대문구 답십리동 20-206

○ 공사개요

구 분	2013년	2014년	비 고
슬라브 보강		보강재 설치 2,758m
PSC빔 보강	External Tendon 설치36본
내진보강		강재전단키 설치 42개소
내구성 개선	표면처리 540㎡, 면보수 250㎡	신축이음교체 84.6m

○ 예 산 액 : 900,000천원(2014년)

○ 사업기간 : 2014. 2 ~ 2014. 4.

▫ 추진현황 및 향후 계획

○ 2013. 1. 24 : 전농교 보수보강공사 발주계획 수립

○ 2013. 2.  1 : 공사계약심사 요청

○ 2013. 2. 19 : 계약심사 결과 통보

○ 2013. 4.    : 공사 계약

○ 2013. 12.   : 1차공사 준공

○ 2014. 2. ~ 2014. 4 : 2차공사 시행

▫ 예산배정계획

(단위 : 천원)

사 업 명	소 계	기배정액	배정요구액	배정잔액	산출내역
계	1,900,000	1,000,000	900,000	-
전농교보수보강공사	1,900,000	1,000,000	900,000	-	∙보수보강공사 923,000천원

▫ 배정사유

○  정밀안전진단 용역에 따른 결함사항을 보수하여 시설물 안전성 확보 및 내구성 증진

○  도로시설물을 신속히 보수하여 주민통행 불편 해소 및 쾌적한 도시미관 조성