동부간선도로확장공사(광역도로구간)

▫ 사업부서 : 도로계획과    도로시설계획팀     팀  장 : 한정무(행정8081)

담당자 : 이성주(행정8082)

▫ 사업개요

◦위    치 : 노원구 초안산 앞 ~ 의정부 시계간(광역도로 구간)

◦규    모 : 연장 5.45km, 도로확장 폭4→6차로

◦공사기간 : 2008. 2 ~ 2019. 12.

◦총사업비 : 3,729억원

▫ 추진현황 및 향후계획

◦'04. 4.16 : 광역도로지정(국토해양부)

◦'04.09. 1~'07.8.17 : 기본 및 실시설계용역 시행

◦'08.02.15 : 3공구 공사착공

◦'08.12.30 : 2공구 공사착공

◦'10.01.19 : 도봉지하차도 1차 연장(증780m)

◦'15.07.23 : 사업계획변경 조정위원회 심의(도봉지하차도 2차연장 및 방음벽 형식 변경)

◦'15.12.16 : 서울시민디자인위원회 심의(디자인공모 방음벽 결정)

◦'15.12.21 : 도봉지하차도 2차 실시설계용역 착수

◦'16.12.31 : 도봉지하차도 2차 실시설계용역 완료 및 공사착수

◦'19.12.31 : 동부간선도로확장 전 구간 개통

▫ 예산배정계획

◦예산과목 : 도로건설, 광역도로건설, 광역교통시설특별회계, 시설비 및 부대비, 시설비, 감리비

(단위 : 천원)

예산과목		예산액	기배정액	배정요구액	배정잔액	산 출 내 역
계		19,854,768	0	19,734,768	120,000
시설비	공사비	18,534,768	0	18,434,768	100,000	2공구 공사비(차수계약) 등
	보상비
감 리 비		1,300,000	0	1,300,000		2,3공구 감리비(차수계약)
시설부대비		20,000	-	-	20,000

※ 배정처 : 도시기반시설본부 토목부

※ 공사비 배정잔액 : 도로계획과 차로조정 교통영향 분석 용역비

◦예산과목 : 도로건설, 광역도로건설, 교통사업특별회계, 시설비 및 부대비, 시설비, 감리비

(단위 : 천원)

예산과목		예산현액	기배정액	배정요구액	배정잔액	산 출 내 역
계		6,029,327	0	4,629,327	1,400,000
시설비	공사비	6,029,327	0	4,629,327	1,400,000	3공구 공사비(차수계약) 등
감리비		-	-	-	-
시설부대비		-	-	-	-

※ 배정처 : 도시기반시설본부 토목부

※ 배정잔액 : 전기‧통신 공사비(도시기반시설본부 설비부) 1,400,000천원

▫ 배정사유(자세히 작성)

◦ 품의서 별첨