동부간선도로확장공사(광역도로구간)

▫ 사업부서 : 도로계획과    도로시설계획팀     팀  장 : 한정무(행정8081)

담당자 : 이성주(행정8082)

▫ 사업개요

◦위    치 : 노원구 초안산 앞 ~ 의정부 시계간(광역도로 구간)

◦규    모 : 연장 5.45km, 도로확장 폭4→6차로

◦공사기간 : 2008. 2 ~ 2019. 12.

◦총사업비 : 2,698억원

▫ 추진현황 및 향후계획

◦'04. 4.16 : 광역도로지정(국토해양부)

◦'04.09. 1~'07.8.17 : 기본 및 실시설계용역 시행

◦'08.02.15 : 3공구 공사착공

◦'08.12.30 : 2공구 공사착공

◦'10.01.19 : 도봉지하차도 1차 연장(증780m)

◦'15.07.23 : 사업계획변경 조정위원회 심의(도봉지하차도 2차연장 및 방음벽 형식 변경)

◦'15.12.16 : 서울시민디자인위원회 심의(디자인공모 방음벽 결정)

◦'15.12.21 : 도봉지하차도 2차 실시설계용역 착수

◦'16.12.31 : 도봉지하차도 2차 실시설계용역 완료 및 공사착수

◦'19.12.31 : 동부간선도로확장 전 구간 개통

▫ 예산배정계획

◦예산과목 : 도로건설, 광역도로건설, 광역교통시설특별회계, 시설비 및 부대비, 시설비, 감리비

(단위 : 천원)

예산과목		예산현액	기배정액	배정요구액	배정잔액	산 출 내 역
계		41,786,514,	0	31,024,947	10,761,567
시설비	공사비	39,816,514	0	29,824,947	9,991,567	2,3공구 공사비 등
	보상비	750,000	0	0	750,000	도봉구 배정
감 리 비		1,200,000	0	1,200,000		2,3공구 및 설계 감리비
시설부대비		20,000	-	-	20,000

※ 배정처 : 도시기반시설본부 토목부

※ 공사비 배정잔액 : 전기‧통신 공사비(설비부) 969,000천원, 동부2공구 추가 공사비 9,022,567천원

◦예산과목 : 도로건설, 간선도로망확충, 교통사업특별회계, 시설비 및 부대비, 시설비, 감리비

(단위 : 천원)

예산과목		예산현액	기배정액	배정요구액	배정잔액	산 출 내 역
계		5,500,000,	0	5,500,000	0
시설비	보상비	5,250,000	0	5,250,000	0	도봉구
감리비		250,000	0	250,000	0	2, 3공구 감리비
시설부대비		-	-	-	-

※ 배정처 : 도시기반시설본부 토목부

※ 공사비 배정잔액 : 전기‧통신 공사비(설비부) 969,000천원, 동부2공구 추가 공사비 9,022,567천원

▫ 배정사유(자세히 작성)

◦ 방침서 별첨