예산 재조정 (안)

▣ 강남순환도시고속도로건설

(단위 : 백만원)

공 구 별		2014년 예산		증 · 감	조정사유
		당초	변경
총 괄		160,450	160,450	-
시설비	설 계 비	1,300	2,370	1,070	4공구 시점부 지하차도 등 설계
	보 상 비	17,850	51,386	33,536	4공구 및 8공구 보상
	공 사 비	139,300	104,694	-34,606	잔여공사비 감액
감리비	감 리 비	2,000	2,000	-
4공구		42,665	37,566	-5,099
시설비	설 계 비	-	363	363	시점부 지하차도 설계비
	보 상 비	-	11,500	11,500	4공구 다운램프 보상
	공 사 비	41,665	24,603	-17,062	지하차도 착수지연 (동절기로 무허가 건물 철거 연기, ‘15.3.이후)
감리비	감 리 비	1,000	1,100	100	-
민자구간		80,000	71,561	-8,439	-
시설비	설 계 비	-	238	238	-
	보 상 비	-	301	301
	공 사 비	80,000	71,022	-8,978	-
감리비	감 리 비	-	-	-	-
8공구		37,785	51,323	13,538
시설비	설 계 비	1,300	1,769	469	대청지하차도 실시설계
	보 상 비	17,850	39,585	21,735	과천시 보상비 지급
	공 사 비	17,635	9,069	-8,566	과천 보상지연으로 시점부 본선교량 착수지연
감리비	감 리 비	1,000	900	-100	감리투입 계획변경