문서번호	토목부-14043
결재일자	2016.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장

오수중계펌프장 오수관(유출) 부단수차단 공법  검토보고

(선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

2016. 7.

도시기반시설본부

(토 목 부)

오수중계펌프장 오수관(유출) 부단수차단 공법 검토보고

(선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

신설 오수중계펌프장 기존오수관(유출) 연결 방안에 대하여 유지관리부서(강동 치수과)에서 상시 가동상태로 연결을 요청함에 따라 부단수차단 공법으로 검토보고 드림.

관련근거

○ 오수중계펌프장 오수관(유출) 부단수 차단 실정보고(선사고덕0420-190호, ‘16. 7.4.)

공사개요

○ 위    치 : 강동구 암사동 440-1 ~ 고덕동 165-11(아리수로)

○ 사업규모 : 아리수로 도로확장 3.7km, 폭 2차로 → 4 ~ 6차로

○ 사업기간 : 2009. 1. 6. ~ 2016.12.31.

○ 총사업비 : 146,077백만원 (도급액 : 35,444백만원)

○ 시 공 사 : ㈜대저건설, ㈜청미건설

추진경위

○ 2016. 6. 7. : 오수중계펌프장 연결 관련 회의(공사관계자, 유관기관)

○ 2016. 6. 8. : 오수중계펌프장 연결 현안사항 보고(선사고덕0420-150호)

○ 2016. 6.10. : 오수중계펌프장 기존관 연결 작업 협의(본부 → 치수과)

○ 2016. 6.14. : 오수중계펌프장 오수관로 연결 작업 검토결과 통보(치수과 → 본부)

검 토

○ 오수중계펌프장은 상시 가동상태를 유지하여야 한다라는 유지관리부서 (강동구 치수과)의 검토결과 회신에 따라 오수관(유출 압송관) 연결에 대하여 부단수차단 공법으로 시행 필요

- 규  모 : 유출오수관(DCIP, D=400㎜, 2개소)

○ 단가검토

- 서울시에서 발표한 원가산출 개선품셈에 부단수차단(라인스토핑) 공법에 D600㎜ 미만은 단가가 없어 2개사 이상 견적을 받아 최저 견적가 적용

견적 업체	장수티엔시	우신이엔지	계명엔지니어링	비고
견 적 가	63,000	63,500	65,300	vat별도
협의 견적가 (90.57%)	57,059	-	-
선 정(안)	○

- 강제협의율(90.57%) 적용

∴ (강제)협의율(90.57%) = [설계가(100%)+낙찰율(81.143)] / 2

※ ‘계약당사자의 책임없는 사유’에 해당되는 경우 신규비목 계약단가는 계약당사자 간 협의에 의해 결정하고 협의가 이루어지지 않는 경우 공사계약일반조건 제7절 1. 나항에 의거 강제협의단가 적용.

공사비 증·감

(단위:천원)

구 분	단위	당 초	변 경	증․감	비 고
직접공사비	1식	-	57,059	57,059
제 경 비	1식	-	2,941	2,941
공사원가	1식	-	60,000	60,000
부가가치세	1식	-	6,000	6,000
도급공사비	1식	-	66,000	66,000
관급자재	1식	-	-	-
총공사비	1식	-	66,000	66,000

감리단 검토의견

○ 오수중계펌프장은 상시 가동상태를 유지하여야 한다라는 유지관리기관 (강동구 치수과)의 회신결과에 따라 오수관(유출 압송관) 연결에 대하여 부단수차단 공법으로 시행이 필요 함.

※ 본 실정보고는 ‘공사계약 일반조건 제6절 공사 설계의 변경 5. 발주기관의 필요에 의한 설계변경’을 근거로 설계변경 하고자 하며, 실정보고 서류 검토결과 내역서, 수량산출서, 단가산출서, 도면 등이 설계도서 작성 제반기준에 맞게 작성되었음.

조치계획

○ 오수중계펌프장 오수관(유출) 부단수 차단 공법으로 실정보고 한 사항에 대하여 감리단 검토의견과 같이 반영이 필요함.

○ 증액되는 공사비 66,000천원에 대하여는 추후 본부 설계변경소위원회(자문) 심의 결과에 따라 반영하고자 함.

붙 임 : 감리단 검토의견서 1부.  끝.