보건환경연구원 옥상 녹화 협의 과제

‘15.10.24(토) 준공에 앞서 주변 환경에 조화되고 파종될 작물에 대한 영향을 최소화 하고자 상호 협의를 통해 일부 공사 계획을 변경 하고자 함.

Ⅰ		냉각탑 부분

□ 공사계획

❍ 벽돌형태의 경계석은 존치하고, 측면 일부 목재를 이용한 파티션 설치

□ 설계변경(요구사항)

❍ 변화된 주변 환경과 조화를 위해 외부에서 냉각탑이 보이지 않도록 조치

- 목재를 이용, 냉각탑 전체를 엄폐할 수 있는 파티션 설치 등 검토

Ⅱ		에어컨 실외기 부분

□ 공사계획

❍ 실외기 작동시 작물에 영향이 없을 것으로 판단, 별도 계획 없음

□ 설계변경(요구사항)

❍ 가동시 작물에 영향 및 미관을 고려하여 엄폐 조치

- 실외기 열풍커버 설치 및 목재를 이용한 파티션 설치 등

Ⅲ		산재된 통신선 등

□ 공사계획

❍ 옥상녹화와는 관련 없는 것으로 판단, 별도 계획 없음

- 에어컨 실외기 연결관, 통신, 전력선 등 산재

□ 설계변경(요구사항)

❍ 준공이후 빈번한 출입에 따른 이용자 안전 및 미관 등 고려 닥트 설치 등

- 박스형 닥트 설치 등 실외기 연결관, 통신, 전력선 등 일괄 매설 검토