문서번호	기전과-4252
결재일자	2015.6.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
협조
	주무관

옥수,금호터널 보도차단벽설치공사 준공기한 연기보고

(전기, 통신, 관급자재)

2015. 6

성동도로사업소

(기  전  과)

옥수·금호터널 보도차단벽설치공사 준공기한 연기보고

(전기, 통신, 관급자재)

우리 과에서 추진 중인 옥수·금호터널 차단벽설치 전기, 통신공사    준공기한 및 관급자재의 납품기한 연장을 검토하여 보고드림

공사개요

공 사 명 : 옥수·금호터널 보도차단벽 설치공사

공사기간 : 2014. 12. 23. ~ 2015. 12. 21.(총차)

(1차 : 2014. 12. 23. ~2015. 06. 30.)

공사개요 : 보도차단벽내 전기, 통신공사

도 급 액

- 전기 :  88,974,590원 (1차 : 47,958,500원)

- 통신 : 153,514,935원 (1차 : 87,000,000원)

- 관급 :  18,942,000원

도 급 자

- 전기 : ㈜현준이엔씨   대표 조현주

- 통신 : ㈜화인전설     대표 이순희

- 관급 : ㈜파인테크닉스 대표 조정혁

보고내용

관련근거 : 시설보수과-2156(2015.06.17.)호

(준공기한 연기보고서 승인 검토)

연기사유 : 토목공사 준공기한이 연기함에 선행공정에 맞추어                   전기.통신공사 준공기한 및 관급자재 납품기한 연기

준공기한 및 납품기한 연기일자

총 차 : 변경 없음

당 초 : 2014. 12. 23. ~ 2015. 06. 30.(1차분)

변 경 : 2014. 12. 23. ~ 2015. 09. 20.(전기, 통신, 관급자재 1차분)

보고자의견

토목공사가 공가기간을 연장함에 따라 전기, 통신공사 준공기한 및 관급자재 납품기한을 연기가 불가피하여 검토하여 보고드림.

첨 부 : 준공기한 연기 보고서 승인 검토 1부. 끝.